【 붙임5 】

문수동 주민(자치)센터 신축사업

- 단계 : 기본계획 -

회계과, 위준용, 061-659-3221

일반 현황	소 재 지	여수시 문수동 169(현 여문테니스장)
	인구 수	20,904명(2021.12.31.기준)
	공무원 수	24명/24명	현원/정원
	재정자립도	27.02%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적			기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)				비고
	합계	1999. 2.				814.5㎡						756.58㎡		지상 3층
	주민센터	1999. 2.				814.5㎡						756.58㎡		지상 3층
	청사신축 필요성			노후되고 협소한 기존 청사의 신축을 통한 주민불편 해소 및 업무효율 증대
	사업기간			2022. 1. ~ 2023. 12.(2년)
	사업수행방식			설계･시공 분리 : 입찰(적격심사 낙찰제)
	추정(예정)가격			4,467,000,000원				계약금액							낙찰율
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2023. 12.		2,800㎡					1,500㎡			지상 3층
	주민센터		2023. 12.		2,800㎡					1,500㎡			지상 3층

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비	시도비		시군구비	지방채
	합계	4,467					4,467
	당해연도(H)	214					214
	H+1	4,253					4,253
	H+2
	H+3 이후
	총사업비(4,467백만원)
	1) 토지매입비					비고
	2) 설계비		197
	3) 감리비		59
	4) 공사비		4,200
	5) 기타부대비		11

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	투융자심사	2020. 3.	승인	도
	공유재산관리계획	2020. 6.	의결	여수시의회
	중기재정계획	2020. 9.	확정	자체
	타당성 조사	해당없음
	설계	2022. 6.		자체
	착공	2023. 3.		자체
	준공	2023. 12.		자체