특수공시

특수공시 사업 목록

(2021 12. 31. 기준 / 단위 : 억원)

사 업 명		총사업비	부 서 명	비고
1.	진남배드민턴 전용구장 건립	95	체육지원과
2.	조·명 연합수군 테마관광단지 조성	108	관광과
3.	여수시립박물관 건립	263	문화예술과
4.	전라좌수영 동헌일원 복원사업	250	문화예술과
5.	여수 충무지역 새뜰마을 사업	47	도시재생과
6.	도원사거리 일원 하수도중점 관리지역 침수예방사업	214	하수도과
7.	국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	318	하수도과
8.	시민, 진남문예회관 리모델링	198	문화예술과
9.	성산공원 리모델링	68	공원과
10.	웅천 국민체육센터 건립	90	체육지원과
11.	남면사무소 신축	48	회계과
12.	도시재생사업(주거지원형-문수지구)	227	도시재생과
13.	도시재생사업(일반근린형-한려지구)	211	도시재생과
14.	소제지구 택지개발	2,150	공영개발과
15.	남산공원 조성사업	300	공원과
16.	미세먼지 차단숲 조성	100	공원과
17.	여수시 어린이도서관 건립	100	시립도서관
18.	글로벌 스마트 관광도시 조성사업	70	관광과

1	진남배드민턴 전용구장 건립

체육지원과 김지아 (☏ 061-659-3268)

실태		□ 여수시 배드민턴 동호인(1,400여명)의 배드민턴 전용시설 건립 청원
추진방향		□ 배드민턴 전용 구장(14면) 및 샤워실 등의 체육 편의시설 신축
기대효과		□ 배드민턴 전용구장 건립에 따른 종목 역량 강화 및 생활체육 발전 기대 □ 시민 건강증진을 위한 생활 체육 인프라 구축 및 각종대회 유치를 통한 지역 경제 활성화 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 진남체육관길 74(진남체육공원 내)

◦ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 지하1층∼지상 2층/1동, 연면적 3,300㎡, 코트 14면

◦ 사 업 비 : 95억 원(국비 23, 도비 0.5, 시비 72) *특교세 10억원 포함

◦ 공 정 율 : 60%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	95.5	67.5	28	-	-
국 비	23	16	7	-	-
도 비	0.5	0.5	-	-	-
시 비	72	51	21	-	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 지방재정 투자심사	: 2018.  6. 11

◦ 공유재산관리계획 의결	: 2019.  2. 22.

◦ 건축설계 공모 공고	: 2019. 10. 28.

◦ 공모작 선정 및 설계용역 계약체결	: 2020.  2. 25.

◦ 기본 및 설계용역 착수	: 2020.  3.  3.

◦ 건축공사(1차분) 착공	: 2021.  1.  4.

◦ 공사 준공                                        : 2022. 10.

위 치 도

전경사진 (조감도)

2	조·명 연합수군 테마관광단지 조성

관광과 정상기 (☏ 061-659-3882)

실태		□ 급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적으로 대처하고 풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요
추진방향		□ 명나라 수군 도독 진린장군, 등자룡 장군과 조명 연합수군의 항일 전쟁 스토리 등을 활용 역사공원 조성
기대효과		□ 조명연합수군의 항일전쟁 스토리 등 관광상품 개발을 통한 중국 및 국내 관광객 유치 증대와 새로운 관광인프라 구축으로 지역경제 활성화 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 묘도동 410번지 일원

◦ 사업기간 : 2018. 1. ∼ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 테마공원 조성(29,534㎡)

◦ 사 업 비 : 108억원(국비 13, 도비 17, 시비 78)

◦ 공 정 율 : 60%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	108	86	22	0
국 비	13	13	0	0
도 비	17	12	5	0
시 비	78	61	17	0
기 타	0	0	0	0

사업진행 현황

◦ 기본계획 수립	: 2016. 10. 20.

◦ 도시관리계획(역사공원) 결정 고시	: 2019. 11.  7.

◦ 도시계획시설사업 실시계획 인가	: 2020.  4. 16.

◦ 토목·조경공사 착공	: 2020.  9. 24.

◦ 통신공사 착공	: 2021.  5. 24.

위 치 도

전경사진 (조감도)

3	여수시립박물관 건립

문화예술과 소은애(☏ 061-659-4526)

실태		□ 지역문화유산의 체계적인 보존·연구·전시·교육 가능한 박물관 부재
추진방향		□ 지역민의 정체성 확립 및 지역문화 활성화 도모
기대효과		□ 지역민의 문화향유 기회 확대 및 관광자원화로 지역발전 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1865-1번지 일원(이순신공원 내)

◦ 사업기간 : 2018. ∼ 2024.

◦ 사업규모 : 부지면적 33,000㎡, 1동(연면적 6,300㎡)

◦ 사 업 비 : 263억원(국비 101.8, 시비 161.2)

◦ 공 정 율 : 30%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	263	30	62.5	170.5
국 비	101.8	12	25	64.8
시 비	161.2	18	37.5	105.7

사업진행 현황

◦ 여수시립박물관 건립 시민의견조사용역	: 2018. 10. ∼ 2019. 1.

◦ 여수시립박물관 건립 기본계획용역	: 2018. 10. ∼ 2019. 3.

◦ 공립박물관 설립타당성 사전평가 통과	: 2019.  5.  1.

◦ 지방재정 중앙투자심사(1단계) 조건부 승인	: 2019.  7.  2.

◦ 박물관 건축설계 및 전시물 제작・설치 공모	: 2020.  7. ∼ 10.

◦ 설계공모심사 및 당선작 선정	: 2020. 10. 23.

◦ 기본 및 실시설계용역 실시	: 2020. 12. ∼ 2022. 9.

위 치 도

전경사진 (조감도)

4	전라좌수영 동헌일원 복원사업

문화예술과 조찬일(☏ 061-659-4759)

실태		□ 일제감점기에 훼철ㆍ소실된 동헌 복원
추진방향		□ 전라좌수영 동헌일원 유물과 고증자료가 확보되면 문화재 복원사업으로 추진 할 예정이며 고증자료 미확보시 시 관광사업(역사문화공원)으로 추진
기대효과		□ 전라좌수영 겸 삼도수군통제영은 조선수군의 본거지로 체계적인 문화재 보존관리 및 세계적인 역사문화관광자원으로 활용

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 군자동 일원(진남관 주변)

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2025.

◦ 사업규모 : 120필지, 12,981㎡(동산동, 군자동 일부)

◦ 사 업 비 : 250억 원

◦ 공 정 율 : 40%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	250	70	25	155
국 비	-	-	-	-
도 비	-	- -	-	-
시 비	250	70	25	155
기 타	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 전라좌수영 동헌일원 복원사업 기본계획 수립	: 2015.  8.

◦ 여수 도시관리계획(공원) 결정 및 실시계획 인가 : 2016. ~ 2017. 1.

◦ 토지(27필지) 및 건물(17동) 매입, 철거	: 2017. 6. ~ 2019. 10.

◦ 1,2차 시․발굴조사	: 2018. 4. ~ 2019. 10.

◦ 토지(11필지) 및 건물(6동) 매입, 철거(동산동 일원) : 2021. 6. ~ 12.

◦ 토지(11필지) 및 건물(9동) 매입(군자동 일원)    : 2021. 4.

위 치 도

전경사진 (조감도)

5	여수 충무지역 새뜰마을 사업

도시재생과 최원혁 (☏ 061-659-4560)

실태		□ 낙후된 정주여건과 부족한 기반시설
추진방향		□ 기반시설 정비와 주민역량강화 사업
기대효과		□ 주민들의 생활여건 개선으로 인한 주거질 향상 및 삶의 질 개선

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 충무동 207-48번지 일원

◦ 사업기간 : 2016. ~ 2021.(6년간)

◦ 사업규모 : 상하수도, 커뮤니티센터, 소공원, CCTV, 보안등, 역량강화 등

◦ 사 업 비 : 47억 원(국비 32, 도비 5, 시비 10)

◦ 공 정 율 : 100%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	47	47	-	-
국 비	32	32	-	-
도 비	5	5	-	-
시 비	10	10	-	-
기 타	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 순환형 임대주택 리모델링공사 추진	: 2018. 12. ~ 2019.  4.

◦ 커뮤니티센터 준공	: 2019.  6. 19.

◦ 집수리 지원사업 추진	: 2019.  6. ~ 2021.  7.

◦ 기반시설공사 준공	: 2021.  6.  2.

◦ 휴먼케어 및 역량강화사업 준공	: 2021.  6.  3.

◦ 경관조성(골목벽화)사업 준공	: 2021. 10. 20.

위 치 도

전경사진 (조감도)

6	도원사거리 일원 하수도 중점관리지역 침수예방사업

하수도과 박채원 (☏ 061-659-4993)

실태		□ 저지대인 도원사거리 일원은 바닷물 만조와 집중호우가 겹칠 시 침수피해 발생
추진방향		□ 정비대책에 따른 빗물펌프장, 유수지 설치 및 관로정비 추진
기대효과		□ 침수피해를 예방하여 시민안전 확보 및 사유재산 보호

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 학동 201번지(용기공원 나르샤호텔 앞)

◦ 사업기간 : 2021. 11. 9. ∼ 2023. 10. 17.

◦ 사업규모 : 빗물펌프장 300㎥/분, 유수지 3,000㎥, 관로정비 4.2㎞

◦ 사 업 비 : 214억 원(국비 149, 시비 65)

◦ 공 정 율 : 3%(설계도서 검토 등)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	214	42	24	148
국 비	150	25	17	108
도 비	-	-	-	-
시 비	64	17	7	40
기 타	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 중점관리지역 지정․공고(환경부)	: 2017. 12.  4.

◦ 하수도정비대책 수립	: 2018.  3. ～ 2019. 6.

◦ 지방재정 투자심사	: 2018. 11.  9.

◦ 기본 및 실시설계용역	: 2019. 11. ～ 2021. 8.

◦ 지방건설기술심의, 재원협의 완료	: 2021.  4. 28.

◦ 공사계약 및 착공	: 2021. 11.  9.

위 치 도

전경사진 (조감도)

7	국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업

하수도과 박채원 (☏ 061-659-4993)

실태		□ 저지대인 롯데마트 일원은 바닷물 만조와 집중호우가 겹칠 시 침수피해 발생
추진방향		□ 정비대책에 따른 빗물펌프장, 유수지 설치 및 관로정비 추진
기대효과		□ 침수피해를 예방하여 시민안전 확보 및 사유재산 보호

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 봉산동 100-13번지 일원

◦ 사업기간 : 2020 ∼ 2025.

◦ 사업규모 : 빗물펌프장 1,860㎥/분, 유수지 17,000㎥, 관로정비 2.0㎞

◦ 사 업 비 : 318억 원(국비 223, 시비 95)

◦ 공 정 율 : 기본 및 실시설계 중

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	318.00	27.14	34.05	256.81
국 비	222.60	5.00	23.84	193.76
도 비	-	-	-	-
시 비	95.40	22.14	10.21	63.05
기 타	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 부지 사용 협의(여수지방해양수산청)	: 2019.  7. 26.

◦ 중점관리지역 지정 및 공고(환경부)	: 2019.  9. 27.

◦ 지방재정 투자심사(중앙)	: 2019. 10. 31.

◦ 하수도정비대책 승인(환경부)	: 2020.  4.  7.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2020. 12.  9.

위 치 도

전경사진 (조감도)

8	시민회관, 진남문예회관 리모델링 사업

문화예술과 윤영상(☏ 061-659-4754)

실태		□ 시설 노후화로(시민회관 35년, 진남문예회관 29년) 인한 안전 문제 대두
추진방향		□ 공연장 2개동의 건축물 및 공연장 설비 전체에 대한 리모델링
기대효과		□ 지역민에게 다양한 문화 컨텐츠 제공, 질 높은 문화공연 공간 조성

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 좌수영로 69(시민회관, 진남문예회관)

◦ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 지하1층, 지상 3층 / 2동, 부지 5,255㎡, 연면적 7,773㎡

- 시민회관 : 연면적 5,265㎡, 960석, 1987년 준공

- 문예회관 : 연면적 2,508㎡, 266석, 1993년 준공

◦ 사 업 비 : 198억 원(국비 8, 시비 190)

◦ 공 정 율 : 10%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	198	28	-	170
국 비	8	8	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	190	20	-	170
기 타	-	-	-	-

사업진행 현황

○ 시민․진남문예회관 리모델링 기본계획 수립	: ’19.  2. ～ 6.

○ 투자심사, 건축기획심의 등 행정절차 이행	: ’19.   10. ∼ ’20.  3.

○ 건축설계공모, 기본 및 실시설계용역	: ’20.  5. ～ ’22.  9.

○ 현재 실시설계용역 진행 중

위 치 도

전경사진 (조감도)

9	성산공원 리모델링 사업

공원과 차범찬 (☏ 061-659-4623)

실태		□ 조성된 지 20여년이 경과한 공원으로, 산책로, 체육시설 등 시설물이 노후 됨.
추진방향		□ 노후된 공원을 리모델링하여 호수를 활용한 특색있는 공원으로 재조성
기대효과		□ 어르신과 어린이들이 함께 어울릴 수 있는 휴식공간 제공

사 업 개 요

◦ 위    치 : 화장동 949번지(성산공원)

◦ 사업기간 : 2020. 6. ∼ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 공원 리모델링 A= 79,845㎡

- 인도교, 수변데크, 어린이물놀이장 조성 등

◦ 사 업 비 : 68억 원

◦ 공 정 율 : 80%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	68	35	33	0
국 비	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0
시 비	68	35	33	0
기 타	0	0	0	0

사업진행 현황

◦ 사업 계약체결 및 착공	: 2020.  6. 25.

◦ 1차분(인도교, 주차장 개보수) 완료	: 2021.  5. 26.

◦ 2차분(산책로 정비, 장미동산 확대 등) 완료	: 2021.  9.  4.

◦ 3차분(수변데크 L=270m, 보도블럭 교체 등) 완료	: 2021.  5. 31.

◦ 4차분(물놀이시설, 체육시설 등) 추진 중	: 2021.  7.

위 치 도

전경사진 (조감도)

10	웅천국민체육센터 건립

체육지원과 김지아 (☏ 061-659-3268)

실태		□ 증가하는 체육시설 수요 충족 필요 및 시민체력증진과 건강한 여가활동 지원
추진방향		□ 수영장(5레인) 포함 등 다목적 체육관 신축
기대효과		□ 공공체육시설 균형배치를 통해 생활체육시설 사각지대 해소

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1865-1번지(이순신 공원)

◦ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 지하1층∼지상 2층/1동, 연면적 2,700㎡,

- 수영장(5Lane) 및 다목적 체육관 신축

◦ 사 업 비 : 90억 원(기금 40, 시비 50)

◦ 공 정 율 : 기본 및 실시설계용역 중

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	90	15	75	-	-
국 비	40	15	25	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	50	-	50	-	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 지방재정투자심사(전라남도)	: 2020. 3. 27.

◦ 공유재산관리계획 심의 의결	: 2020. 3. 30.

◦ 공모작 선정	: 2021. 2. 25.

◦ 기본 및 실시설계 용역 착공	: 2021. 3. 23.

◦ 설계용역 준공(행정절차 이행 포함)	: 2022.  8.

◦ 공사 착공	: 2022.  9.

◦ 공사 준공	: 2023.  12.

위 치 도

전경사진 (조감도)

11	남면사무소 신축

회계과 송수진 (☏ 061-659-5253)

실태		□ 노후·협소 및 붕괴 위험으로 주민자치센터 운영·행정능률 저하
추진방향		□ 노후된 기존 면사무소를 철거 후 신축
기대효과		□ 주민복지 및 행정서비스의 질적 향상

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 남면 우학리 649-1

◦ 사업기간 : 2022. 7. 1. ~ 2023. 3. 27.

◦ 사업규모 : 지상3층 / 1동, 연면적 1,328.11㎡

◦ 사 업 비 : 48억 원

◦ 공 정 율 :  3%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	48.5	4	23	21.5
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	48.5	4	23	21.5
기 타	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 남면사무소 신축 방침 결정	: 2020.  4. 16.

◦ 부지매입 완료	: 2020. 12.  7.

◦ 건축설계 공모	: 2021.  4. 27.

◦ 일상감사 및 계약심사 완료	: 2022.  5. 25.

◦ 계약체결	: 2022.  6. 23.

◦ 착공	: 2022.  7.  1.

위 치 도

전경사진 (조감도)

12	도시재생사업(주거지원형-문수지구)

도시재생과 곽원 (☏ 061-659-4559)

실태		□ 노후화 된 주택밀집지역 및 기반시설 부족
추진방향		□ 기반시설정비 및 주택외관개선사업
기대효과		□ 공동체 인프라 구축, 자력 재생 활성화

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 문수동 59-20번지 일원(문수동 주택단지 일원)

◦ 사업기간 : 2019. ~ 2022.

◦ 사업규모 : 주택정비, 도로정비, 우·오수관 정비, 주차장 조성, 쌈지공원 조성

◦ 사 업 비 : 227억 원(국비 100, 시비 127)

◦ 공 정 율 : 75%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	227	159	68	-	-
국 비	100	81	19	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	127	78	49	-	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 도시재생활성화계획 수립 승인, 고시	: 2019. 12. 31.

◦ 집수리 지원사업 추진(580가구)	: 2020.  6. ~ 2022. 12.

◦ 연계사업 추진(상·하수도, 도시가스)	: 2021. 10. ~

◦ 어울림센터 신축공사 준공	: 2022.  6. 28.

◦ 한전지중화사업 추진	: 2021. 12. ~ 2022. 9.

◦ 중심가로 경관 사업 및 순환형임대주택 등 착공 : 2022.  5.

위 치 도

전경사진 (조감도)

13	도시재생사업(일반근린형-한려지구)

도시재생과 최원혁 (☏ 061-659-4560)

실태		□ 노후화 된 주택밀집지역 및 기반시설 부족
추진방향		□ 부정적 이미지 탈피, 창업지원을 통한 마을 구축
기대효과		□ 공동체 발전, 정주환경개선

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 공화동, 수정동 일대(A=132,627㎡)

◦ 사업기간 : 2019. ~ 2022. (4년)

◦ 사업규모 : 청소년돋움주택, 상권활성화, 정주환경개선(상·하수도, 집수리 등) 등

◦ 사 업 비 : 211억 원(국비 80, 도비 13, 시비 118)

◦ 공 정 율 : 60%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	211	96	115	-	-
국 비	80	57	23	-	-
도 비	13	9	4	-	-
시 비	118	30	88	-	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 도시재생 뉴딜사업 선정, 발표	: 2019.  4.  8.

◦ 도시재생 활성화계획 수립 승인 고시	: 2020.  7.  1.

◦ 돋움여건 조성공사 등 편입토지 철거 추진 완료	: 2021. 12.

◦ 순환형 임대주택공사 준공(6호)	: 2022.  2.  1.

◦ 한려지구 공영주차장 조성공사 착공	: 2022.  6. 29.

위 치 도

전경사진 (조감도)

14	소제지구 택지개발

공영개발과 박  성 (☏ 061-659-4575)

실태		□ 국가산단 증설에 따른 신규유입 산단 종사자에게 주거지 제공 필요
추진방향		□ 경관이 탁월한 지역에 택지를 조성하여 양질의 주거지 제공
기대효과		□ 양질의 주거지 제공으로 외부 인구유출 방지

사 업 개 요

◦ 위    치 : 소호동 소제, 음달마을 일원

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2024. 6.

◦ 사업규모 : 택지개발 417,654㎡

◦ 사 업 비 : 2,150억 원(공사비 513, 보상비 1,324, 기타 313)

◦ 공 정 율 : 20%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	2,150	1,505	131	514
국 비	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0
시 비	2,150	1,505	131	514
기 타	0	0	0	0

사업진행 현황

◦ 택지개발사업 실시계획 승인․고시	: 1991. 12. 28.

◦ 개발계획 변경 승인	: 2018.  6. 21.

◦ 보상 열람공고	: 2019.  1. 24.

◦ 실시계획변경 승인	: 2020.  6. 25.

◦ 택지개발공사 착공	: 2021.  4. 28.

위 치 도

전경사진 (조감도)

15	남산공원 조성사업

공원과 김승일 (☏ 061-659-4622)

실태		□ 종포해양공원 등 구도심과 바다를 조망할 수 있는 공원 조성
추진방향		□ 전망데크, 미로정원 등 조성으로 볼거리ㆍ즐길거리 제공
기대효과		□ 자연친화적 공간 활용으로 푸른 여수 상징 및 시민 휴식공간 제공

사 업 개 요

◦ 위    치 : 남산동 274번지 일원(남산공원)

◦ 사업기간 : 2012. 〜 2022.

◦ 사업규모 : 근린공원 조성(A= 179,932㎡)

◦ 사 업 비 : 300억원 [1단계 204(공사84, 보상120), 2단계 96(공사86, 보상 10)]

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	300	260	40	0
국 비	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0
시 비	300	260	40	0
기 타	0	0	0	0

사업진행 현황

◦ 근린공원 결정고시(건교부 고시 제137호)          : 1976.  3. 27.

◦ 남산공원(1단계) 조성사업 준공                   : 2017. 11. 24.

*1단계(’12.〜’17.): 진입도로 L= 427m, 주차장 A= 3,388㎡(100면)

◦ 현장간담회, 설문조사 등 공원조성 방향 의견 수렴 : 2018. 7.∼ 2019. 1.

◦ 남산공원(2단계) 조성사업 착공                   : 2020. 6. 25.

위 치 도

전경사진 (조감도)

16	미세먼지 차단숲 조성

공원과 차범찬 (☏ 061-659-4623)

실태		□ 산단에서 발생되는 미세먼지를 차단(저감) 시키는 녹지공간 조성 필요
추진방향		□ 공원, 녹지대 등에 미세먼지 차단(저감)용 다열복층림 구조의 숲 조성
기대효과		□ 미세먼지 차단 숲 조성으로 시민 건강증진 및 녹색 휴식공간 제공

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 소라면 덕양리 1412-24번지 일원 등

(양지바름공원 등 5개소)

◦ 사업기간 : 2020. 1 ∼ 2022. 12

◦ 사업규모 : 미세먼지 차단숲 조성 A=10ha

◦ 사 업 비 : 100억원

◦ 공 정 율 : 80%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	100	88	12	0
국 비	50	48	2	0
도 비	0	0	0	0
시 비	50	40	10	0
기 타	0	0	0	0

사업진행 현황

◦ 2020년 사업 착공 (A=3ha / 양지바름공원)	: 2020.  8.

◦ 2020년 사업 준공	: 2021.  4.

◦ 2021년 사업 착공 (A=7ha / 4개사업장)	: 2021.  5.

◦ 2021년 사업 3개지구 준공 (A=4.9ha)	: 2021. 11.

◦ 잔여 사업장 (A=2.1ha)	추진 중	: 2022.  7.

위 치 도

율촌제1일반산업단지

율촌산단 미세먼지

차단숲 조성지

전경사진 (조감도)

17	여수시어린이도서관 생활SOC복합화사업

시립도서관 김가은 (☏ 061-659-4777)

실태		□ 어린이 특화 시설 수요 급증 및 죽림지구 신시가지 개발
추진방향		□ 영유아 및 어린이를 위한 전문화된 독서문화체험시설 확충
기대효과		□ 자녀 교육 및 아이 키우기 좋은 환경조성

사 업 개 요

◦ 위    치 : 전라남도 여수시 소라면 죽림리 1248번지(산들공원)

◦ 사업기간 : 2021. 11. ~ 2024. 12.

◦ 사업규모 : 대지면적 5,239.4㎡, 연면적 2,500㎡(지하1층, 지상3층)

◦ 사 업 비 : 100억원(국비 6.25, 도비 37.27, 시비 56.48) ※ 부지(시유지) 7.6 포함

◦ 공 정 율 : 5%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	10,000	817	1,250	7,933
국 비	625	0	625	0
도 비	3,727	0	0	3,727	균특전환
시 비	5,648	817	625	4,206
기 타	0	0	0	0

사업진행 현황

◦ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	: ’20. 11. ～ ’21. 3.

◦ 균특예산 및 생활SOC 복합화사업 신청․선정: ’21. 2.  ～ 10.

◦ 공공건축 기획 용역 및 사업계획 사전 검토	: ’21. 11. ～ ’22. 3.

◦ 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 용역	: ’21. 11. ～ ’22. 12.

◦ 통합설계 공모 및 기본․실시설계 용역	: ’22. 4.  ～ ’23. 3.

위 치 도

현장사진

18	여수시 글로벌 스마트 관광도시 조성사업

관광과 김태원 (☏ 061-659-3996)

실태		□ 코로나 시대 관광시장 재편으로 인해 새로운 관광 콘텐츠 개발 필요
추진방향		□ ICT융복합 기술을 적용한 관광 편의성과 스마트 관광서비스 인프라를 제공하고, 다양한 관광 콘텐츠를 접목한 스마트 관광도시 육성
기대효과		□ 여행객의 수요 맞춤형 콘텐츠와 소비 결과의 즉각적인 피드백 기반으로 관광생태계 선순환 사이클 조성

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수해양공원 일원(스마트경험)/ 여수시 일원(통합앱 플랫폼)

◦ 사업기간 : 2021. 11. ~ 2022. 9.

◦ 사업규모 : 이순신광장 ~ 낭만포차, 1.5km

◦ 사 업 비 : 70억 원(국비 35, 도비 7, 시비 28)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	70	0	70	0
국 비	35	0	35	0
도 비	7	0	7	0
시 비	28	0	28	0
기 타	0	0	0	0

사업진행 계획

◦ 행정절차(사전정보화 협의, 보안성검토 등) 이행	: 2022. 1. ∼ 2.

◦ 계약체결(여수시↔컨소시엄사)	: 2022. 4. 18.

◦ 시설물 설치 위치별 관련부서 협의	: 2022. 5. ∼ 7.

◦ 회계검증 용역 계약 체결	: 2022. 6. 13.

◦ 드론라이트쇼 및 감리용역 행정절차 이행 중	: 2022. 6. ∼ 7.

◦ 통합 앱 플랫폼 개발	: 2022. 4. ∼ 8.

위 치 도

전경사진 (조감도)