【 붙임5 】

죽림행정복합시설 신축사업

- 단계 : 기본계획 -

회계과, 김보미, 061-659-3223

일반 현황	소 재 지	여수시 죽림리 1170번지
	인구 수	21,653명(2021.12.31.기준)
	공무원 수	9명/9명	현원/정원
	재정자립도	27.02%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적			기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)				비고
	합계
	죽림출장소																	없음
	건강생활지원센터																	없음
	청사신축 필요성			죽림택지지구 개발에 따른 청사의 신축을 통한 주민불편 해소 및 업무효율 증대
	사업기간			2023. 2. ~ 2025. 4.
	사업수행방식			설계･시공 분리 : 입찰(적격심사 낙찰제)
	추정(예정)가격			8,508,000,000원				계약금액							낙찰율
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2025. 4.		1,036㎡					1,925㎡			지상 5층
	주민센터		2025. 4.		1,036㎡					1,925㎡			지상 5층

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비	시도비		시군구비	지방채
	합계	8,508		1,160	290		7,319
	당해연도(H)			449	249		345
	H+1(2024)			711	41		3,974
	H+2(2025)						3,000
	H+3 이후
	총사업비(8,508백만원)
	1) 토지매입비		470			비고
	2) 설계비		432
	3) 감리비		80
	4) 공사비		7,507
	5) 기타부대비		19

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	공모사업 확정	2022. 9.	확정	보건복지부
	지방재정 투자심사	2023. 2.	의결	전라남도
	공유재산관리계획	2023. 9.		여수시의회
	타당성 조사	해당없음
	설계	2023. 9.		자체
	착공	2024. 4.		자체
	준공	2025. 4.		자체