【 붙임5 】

화정면사무소 신축사업

- 단계 : 기본계획 -

회계과, 김보미, 061-659-3223

일반 현황	소 재 지	여수시 화정면 백야리 227, 228, 228-2, 230
	인구 수
	공무원 수	19명/19명	현원/정원
	재정자립도	27.02%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적			기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)				비고
	합계					1,726㎡						704.24㎡		지상 2층
	주민센터	1988. 9. 22.				1,726㎡						704.24㎡		지상 2층
	청사신축 필요성			노후되고 협소한 기존 청사의 신축을 통한 주민불편 해소 및 업무효율 증대
	사업기간			2023. 4. ~ 2025. 8.
	사업수행방식			설계･시공 분리 : 입찰(적격심사 낙찰제)
	추정(예정)가격			6,646,000,000원				계약금액							낙찰율
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2025. 8.		3,545㎡					1,300㎡			지상 3층
	주민센터		2025. 8.		3,545㎡					1,300㎡			지상 3층

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비	시도비		시군구비	지방채
	합계	6,590
	당해연도(H)	818
	H+1(2024)	283
	H+2(2025)	5,489
	H+3 이후
	총사업비(1,570백만원)
	1) 토지매입비		848			비고
	2) 설계비		2,560
	3) 감리비		2,800
	4) 공사비		5,228
	5) 기타부대비		53

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	공유재산관리계획	2023. 6.		여수시의회
	중기재정계획	2023. 6.		자체
	타당성 조사	해당없음
	설계	2024. 2.		자체
	착공	2024. 11.		자체
	준공	2025. 8.		자체