정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	율촌중학교 앞 도로확장 공사
② 추진배경	통학생 및 주민 통행불편 해소를 위하여 기존도로 확장
③ 사업개요	○ 위 치 : 율촌면 조화리 136-6번지 일원 ○ 사 업 량 : L=170m, B=8~11m ○ 사 업 비 : 1,950백만원(설계 및 공사 920 보상 등 1,030)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설8급 안준희 시설5급 박성식
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‵19. 8. ~ ‵26. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 착수계(실시설계용역) ※ 도로과-11221호		‵19. 8. 27.		김종서 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 통보 ※ 회계과-66709호		‵19. 12. 23.		김종서 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업인정에 관한 의견청취 결과 제출 ※ 도로과-6115호		‵20. 5. 7.		서유권 과장 이덕연 팀장 정준호 주무관 장문희 주무관
○ 사업인정 의견청취 결과제출 ※ 도로과-6140호		‵20. 5. 8.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 알림 ※ 도시계획과-14534호		‵20. 6. 19.		정준호 주무관
○ 무상귀속(양도)검토결과 알림 ※ 도시계획과-15096호		‵20. 6. 26.		정준호 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 해지 통보 ※ 회계과-46188호		‵20. 8. 10.		임선진 주무관
○ 실시설계용역 준공검사공무원 지정통보 ※ 회계과-46243호		‵20. 8. 11.		임선진 주무관
○ 율촌중학교 공유재산 손실보상계약 및 손실보상금 청구 ※ 재정지원과-11314호		‵21. 7. 14.		김용찬 주무관
○ 도시계획시설(도로) 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과-10344호		‵21. 8. 27.		강균 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 편입토지(지장물)등에 대한 실태조사 계획 알림 ※ 도로과-2547호		‵22. 3. 7.		오정환 과장 김정아 팀장 조진우 주무관 장문희 주무관
○ 주거이전 대상자 실태조사 결과보고 ※ 도로과-3107호		‵22. 3. 21.		오전환 과장 전결 김정아 팀장 대결 장문희 주무관
○ 지장물 실태조사 결과보고 ※ 도로과-3101호		‵22. 3. 21.		오전환 과장 전결 김정아 팀장 대결 장문희 주무관
○ 보상계획 열람공고 ※ 도로과-3230호		‵22. 3. 22.		오전환 과장 전결 김정아 팀장 대결 조진우 주무관 장문희 주무관
○ 감정평가 계획알림 ※ 도로과-3995호		‵22. 4. 11.		오전환 과장 김정아 팀장 장문희 주무관
○ 편입토지(지장물)등에 대한 보상협의 요청(최종) ※ 도로과-7879호		‵22. 7. 15.		오전환 과장 김정아 팀장 전명수 팀장 조진우 주무관 장문희 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 ※ 도시계획과-18894호		‵22. 8. 29.		조진우 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 취소 요청 ※ 도로과-3431호		‵23. 3. 30.		오정환 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 폐지(취소)알림 ※ 도시계획과-8009호		‵23. 4. 5.		최영민 주무관
○ 도로구역 결정 용역 시행 ※ 도로과-6007호		‵23. 6. 5.		오정환 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 도로구역 결정 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 ※ 도로과-8130호		‵23. 7. 21.		심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 국유재산 무상귀속 사전협의 결과 알림 ※ 지역계획과-11608호		‵23. 8. 9.		최영민 주무관
○ 사업인정 의견청취 결과보고 ※ 도로과-10918호		‵23. 9. 27.		심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 도로구역 결정 및 지형도면 고시 ※ 도로과-13901호		‵23. 12. 8.		심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 지적 분할측량 의뢰 ※ 도로과-14012호		‵23. 12. 12.		심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 보상계획 열람공고 알림 ※ 도로과-975호		‵24. 1. 23.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 편입토지 등에 대한 감정평가 계획 알림 ※ 도로과-1850호		‵24. 2. 15.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 편입토지 등에 대한 보상협의 요청(1차) ※ 도로과-3621호		‵24. 2. 15.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 관급자재 선정 심의 요청 ※ 도로과-3873호		‵24. 3. 28.		명호남 과장 결재 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ 도로확장공사 시행 계획 ※ 도로과-4422호		‵24. 4. 9.		김종기 부시장 전결 염승열 건설교통국장 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 명호남 과장 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ GIS DB 구축용역 시행 계획 ※ 도로과-4400호		‵24. 4. 9.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ 건설폐기물 처리용역 시행 계획 ※ 도로과-4408호		‵24. 4. 9.		염승열 건설교통국장 전결 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 명호남 과장 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ 재해예방 기술지도용역 시행 계획 ※ 도로과-4406호		‵24. 4. 9.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ 편입토지 등에 대한 보상협의 요청(2차) ※ 도로과-5038호		‵24. 4. 25.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 편입토지 등에 대한 보상협의 요청(2차) ※ 도로과-5728호		‵24. 5. 10.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 지정폐기물 철거공사 시행 계획 ※ 도로과-6295호		‵24. 5. 23.		명호남 과장 전결 고영백 청사관리팀장 김진욱 계약1팀장 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ 지정폐기물 처리용역 시행 계획 ※ 도로과-6292호		‵24. 5. 23.		명호남 과장 전결 고영백 청사관리팀장 김진욱 계약1팀장 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ 공사 등 6건 일시정지 검토보고 ※ 도로과-494호		‵24. 7. 16.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 보상계획 공시송달 공고의뢰 ※ 도로과-1182호		‵24. 8. 2.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 대결 박시영 실무원
○ 도로구역(변경)결정 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 ※ 도로과-3985호		‵24. 10. 21.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 대결 곽 원 팀장 백두산 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 결과보고 ※ 도로과-4682호		‵24. 11. 7.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 박시영 실무원 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 사업인정(의제)사업 경미한 변경에 따른 추가협의 요청(율촌중학교 앞 도로확장) ※ 도로과-4980호		‵24. 11. 18.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 박시영 실무원 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시(율촌중학교 앞 도로확장) ※ 도로과-5790호		‵24. 12. 9.		정진희 팀장 대결 곽 원 팀장 백두산 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」편입토지 등에 대한 손실보상비 산정 및 집행 계획 ※ 도로과-6095호		‵24. 12. 16.		이동일 국장 전결 명호남 과장 강행숙 과장 정일권 팀장 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 보상계획 열람공고「율촌중학교 앞 도로확장공사」 ※ 도로과-247호		‵25. 1. 8.		박성식 과장 전결 정진희 팀장 박시영 실무원
○ 지적 분할측량 의뢰(율촌중학교 앞 도로확장공사) ※ 도로과-2287호		‵25. 3. 6.		박성식 과장 전결 곽 원 팀장 안준희 주무관
○ 지역현안 특별교부세 용도변경 검토보고(율촌중학교 앞 도로확장공사) ※ 도로과-2555호		‵25. 3. 10.		정기명 시장 결재 최정기 부시장 최연호 국장 신영자 과장 신숙이 팀장 박성식 과장 정진희 팀장 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」편입 토지(지장물 등) 감정평가 수수료 집행 ※ 도로과-2438호		‵25. 3. 11.		박성식 과장 전결 정진희 팀장 박시영 실무원
○ 지적공부정리(토지이동 및 분할) 신청(율촌중학교 앞 도로확장공사) ※ 도로과-4536호		‵25. 4. 29.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○ 2025년 제3회 지방토지수용위원회 재결신청서 수정 제출(율촌중학교 앞 도로확장공사) ※ 도로과-5985호		‵25. 6. 9.		최연호 국장 전결 박성식 과장 정진희 팀장 박시영 실무원
○ 도로구역 결정(정정) 및 지형도면 고시(율촌중학교 앞 도로확장) ※ 도로과-6121호		‵25. 6. 12.		박성식 과장 전결 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 수용재결 신청에 따른 감정평가 수수료 집행 ※ 도로과-7364호		‵25. 7. 9.		박성식 과장 전결 정진희 팀장 박시영 실무원
○ 2025년 제3회 전라남도지방토지수용위원회 토지수용재결에 따른 공탁금 위임 집행(율촌중학교앞도로) ※ 도로과-9747호		‵25. 9. 8.		박성식 과장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 정진희 팀장 박시영 실무원
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 설계변경 심의 요청 ※ 도로과-9757호		‵25. 9. 8.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 현장 실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 도로과-10623호		‵25. 10. 1.		최연호 국장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 박성식 과장 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 일시정지 해지 및 변경계약 의뢰 ※ 도로과-10630호		‵25. 10. 1.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」토지수용재결에 따른 공탁 및 소유권 이전 수수료 집행 ※ 도로과-10681호		‵25. 10. 2.		박성식 과장 전결 김은희 팀장 박시영 실무원