정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수 석보(당초 석창성지) 정비
② 추진배경	사적 제523호 <여수 석보>를 문화재보호법 제34조, 문화재보호법 시행령 제20조, 문화재청예규 제254조「사적 종합정비계획의 수립 및 시행에 관한 지침」에 따라 사적의 효율적인 보존·관리 및 활용하고자 함
③ 사업개요	○ 사업위치 : 여수시 여천동 868번지 등 여수 석보 일원 ○ 총사업비 : 30,585백만 원(국비 70%, 지방비 30%) ○ 사업내용 : 성벽 보존 정비, 학술연구, 탐방로 및 주차장 조성, 화장실 신축 등 ○ 대상면적 : 106필지 77,393㎡(성 내부 토지 매입 완료) - 매입 104필지(75,658㎡), 미매입 2필지(1,735㎡)
④ 사업부서	여수시 문화유산과		⑤ 담당자	시설7급 임선진 학예연구사 손인희 행정5급 조정만
⑥ 선정기준	10억원 이상의 공사		⑦ 사업기간	`91. ~ `33.
<그간 주요 추진내용>
○ 국가지정문화재 지정 고시 (사적 제523호 여수 석보)		`12.06.22.	장채민 과장 정수만 팀장 소은애 주무관
○ 3차 발굴조사 완료 ※회계과-13383(2015.04.01.)호		`15.04.01.	김재일 과장 장지문 팀장 서혜은 주무관
○ 토지매입(2필지-1,717㎡) ※문화예술과-9212(2015.06.26.)호		`15.06.25.	김재일 과장 장지문 팀장 윤창열 주무관
○ 종합정비 기본계획 용역 완료 ※회계과-30909(2017.06.13.)호		`17.06.12.	하봉영 과장 조민수 팀장 서혜은 주무관
○ 토지매입(1.5필지-1,447㎡) ※문화예술과-12840(2018.07.08)호		`18.06.22	하봉영 과장 김기흥 팀장 장명순 주무관
○ 토지매입계획(0.5필지-783.5㎡) ※문화예술과-833(2019.01.16)호		`19.01.16.	하봉영 과장 김기흥 팀장 조찬일 주무관
○ 토지매입 보상 협의(0.5필지-783.5㎡) ※문화예술과-1034(2019.01.18)호		`19.01.18.	하봉영 과장 김기흥 팀장 조찬일20 주무관

○ 토지매입 보상 협의(0.5필지-783.5㎡) ※문화예술과-7980(2019.04.17)호	`19.04.17.	하봉영 과장 김기흥 팀장 조찬일 주무관
○ 문화재청 국고보조사업 예산 신청 - 1단계 실시설계비 ※문화재전자행정시스템	`19.04.26.	하봉영 과장 김기흥 팀장 강한빛 주무관
○ 문화재청 예산 사전통지 - 주변 정비사업 예산 ※도 문화자원과-12846(2019.9.17.)	`19.09.17.	김지선 과장 윤영희 팀장 강한빛 주무관
○ 문화재청 사전 추진 지침통지 - 주변 정비사업 예산 ※도 문화자원과-501(2020.1.10.)	`20.01.10.	김지선 과장 윤영희 팀장 강한빛 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업 실시설계 용역 준공 ※회계과-47535(2020.8.19.)	`20.08.19.	김지선 과장 황여진 팀장 정동섭 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업 준공 ※문화예술과-23335(2020.10.12.)	`20.10.12.	김지선 과장 황여진 팀장 정동섭 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업 준공 ※문화예술과-26367(2020.11.13.)	`20.11.13.	김지선 과장 황여진 팀장 정동섭 주무관
○ 여수 석보 안내판 제작 ※문화예술과-29727(2020.12.22.)	`20.12.22.	김지선 과장 황여진 팀장 정동섭 주무관
○ 여수 석보 정비사업 추진 협의 면담 추진(국회의원) ※문화예술과-5091(2021.3.8.)	`21.03.08.	고영준 과장 황여진 팀장
○ 여수 석보 노후안내판 정비 ※문화예술과-8188(2021.04.12.)	`21.04.09.	고영준 과장 황여진 팀장 임이슬 주무관
○ 2022년 여수 석보 정비사업 예산신청(문화재청) ※문화예술과-10061(2021.04.30.)	`21.04.30.	고영준 과장 황여진 팀장 지상훈 차장
○ 여수 석보 정비사업(예초) 계약체결 ※회계과-37031(2021.07.09.)	`21.07.09.	고영준 과장 황여진 팀장 김남희 주무관
○ 2022년도 문화재 보수정비(여수 석보) 사업 예산 사전통지 ※도 문화자원과-12587(2021.09.15.)	`21.09.15.	고영준 과장 황여진 팀장 지상훈 차장
○ 여수 석보 주변 정비사업(폐기물 처리 등) 계약체결 ※회계과-62234(2021.12.14.)	`21.12.14.	고영준 과장 황여진 팀장 윤영상 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업(폐기물 처리 등) 준공검사 공무원 지정 ※회계과-66156(2021.12.29.)	`21.12.29.	고영준 과장 황여진 팀장 윤영상 주무관
○ 여수 석보 종합 정비 계획수립 용역 계약 체결 ※회계과-24774(2022.05.24)호	`22.05.23.	김춘수 과장 양현옥 팀장 곽황지 주무관
○ 여수 석보 환경 정비사업 계약 체결 ※회계과-28430(2022.06.13)호	`22.06.13.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김종학 주무관
○ 여수 석보 비석 보존처리 실시설계 용역 계약 체결 ※회계과-34098(2022.07.11)호	‘22.07.11.	조계윤 과장 오병구 팀장 박윤희 주무관
○ 여수 석보 환경 정비사업 계약 체결 ※회계과-43230(2022.09.08)호	‘22.09.08.	한진숙 과장 최철웅 팀장 박윤희 주무관
○ 여수 석보 비석 보존처리 실시설계 승인 요청 ※문화예술과-22332(2022.09.27)호	‘22.09.27.	김춘수 과장 양현옥 팀장 곽황지 주무관
○ 여수 석보 비석 보존처리 설계승인 신청에 대한 회신 ※문화재청 보존정책과-6101(2022.10.18)호	‘22.10.18.	이종훈 과장 최신영 사무관 조선희 주무관
○ 여수 석보 휀스 정비 실시설계 용역 계약 체결 ※문화예술과-26472(2022.11.11)호	‘22.11.11.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 여수 석보 비석 보존처리 실시설계 승인(보완) 요청 ※문화예술과-26674(2022.11.15)호	‘22.11.15.	김용만 팀장(대결) 양현옥 팀장 곽황지 주무관
○ 여수 석보 휀스 정비 실시설계 승인 요청 ※문화예술과-26901(2022.11.16)호	‘22.11.16.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 여수시의원(정옥기) 요구자료 제출 ※문화예술과-26929(2022.11.16)호	‘22.11.16.	김춘수 과장 양현옥 팀장 곽황지 주무관
○ 여수 석보 종합 정비 계획 수립 용역 변경계약 사항 통보 ※회계과-55086(2022.11.18)호	‘22.11.18.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 여수 석보 휀스 정비 실시설계 승인 통지 ※문화재청 보존정책과-6811(2022.11.18)호	‘22.11.18.	이종훈 과장 최신영 사무관 조선희 주무관
○ 여수 석보 휀스 정비 실시설계 용역 완료계 제출 ※문화예술과-27755(2022.11.25)호	‘22.11.25.	김춘수 과장 양현옥 팀장 강병준 주무관
○ 여수 석보 비석 보존처리 실시설계 승인 통지 ※문화재청 보존정책과-7005(2022.11.28)호	‘22.11.28.	이종훈 과장 최신영 사무관 조선희 주무관
○ 여수 석보 비석 보존처리 실시설계 용역 변경계약 체결 알림 ※회계과-57363(2022.12.01.)호	‘22.12.01.	한진숙 과장 최철웅 팀장 박윤희 주무관
○ 여수 석보 휀스 정비 사업 계약 체결 ※회계과-58215(2022.12.06.)호	‘22.12.06.	한진숙 과장 최철웅 팀장 박윤희 주무관
○ 여수 석보 비석 보존처리 실시설계 용역 완료계 제출 ※문화예술과-58716(2022.12.06.)호	‘22.12.06.	김춘수 과장 양현옥 팀장 곽황지 주무관
○ 여수 석보 비석 보존처리 사업 계약체결 ※회계과-58531(2022.12.07.)호	‘22.12.07.	한진숙 과장 최철웅 팀장 박윤희 주무관
○ 여수 석보 비석 보존처리 사업 준공계 제출 ※회계과-30393(2022.12.22.)호	‘22.12.2.	김춘수 과장 양현옥 팀장 곽황지 주무관
○ 여수 석보 종합정비계획수립용역 완료계 제출 ※회계과-7992(2023.03.02.)호	‘23.02.28.	김춘수 과장 양현옥 팀장 손인희 주무관
○ 여수 석보 종합정비계획 수립 용역 검토 요청 ※문화유산과-2277(2023.03.10.)호	‘23.03.10.	김춘수 과장 양현옥 팀장 손인희 주무관
○ 사적「여수 석보」종합정비계획에 대한 검토의견 회신 ※문화재청 보존정책과-2499(2023.04.26.)호	‘23.04.26.	김명준 과장 최신영 팀장 조선희 주무관
○ 여수 석보 주변정비 설계용역 일상감사 및 계약심사 결과 알림 ※감사담당관-5559(2023.05.22.)호	‘23.05.15.	엄태오 팀장(대결) 양현옥 팀장 강민학 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 설계용역 사전규격공고 의뢰 ※문화유산과-5430(2023.05.23.)호	‘23.05.23.	엄태오 팀장(대결) 양현옥 팀장 강민학 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 설계용역 계약의뢰 ※문화유산과-5823(2023.05.31.)호	‘23.05.31.	김춘수 과장 양현옥 팀장 강민학 주무관
○ 2023년 상반기 여수 석보 환경정비사업 계약의뢰 ※문화유산과-6402(2023.06.13.)호	‘23.06.13.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김종학 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 설계용역 계약체결 및 감독공무원 지정 ※회계과-30084(2023.06.23.)호	‘23.06.23.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 실시설계용역 선금급 지급 결정 통보 ※회계과-30785(2023.06.26.)호	‘23.06.26.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 2023년 상반기 여수 석보 환경정비사업 준공계 제출 ※문화유산과-7805(2023.07.11.)호	‘23.07.11.	양현옥 팀장 김종학 주무관
○ 2023년 하반기 여수 석보 환경정비사업 계약의뢰 ※문화유산과-10788(2023.09.13.)호	‘23.09.13.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김종학 주무관
○ 2023년 하반기 여수 석보 환경정비사업 준공계 제출 ※문화유산과-11384(2023.09.25.)호	‘23.09.25.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김종학 주무관
○ 사적「여수 석보」종합정비계획 보완제출 ※문화유산과-11637(2023.10.04.)호	‘23.10.04.	김춘수 과장 양현옥 팀장 손인희 주무관
○ 여수 석보 종합정비계획에 대한 회신 ※문화재청 보존정책과-5823(2023.10.06.)호	‘23.10.06.	김명준 과장 최신영 팀장 조선희 주무관
○ 여수 석보 주변정비 소규모재해영향평가용역 계약의뢰 ※문화유산과-13678(2023.11.20.)호	‘23.11.20.	김춘수 과장 양현옥 팀장 강민학 주무관
○ 국가지정문화재 보수정비지원사업 설계승인 요청 ※문화유산과-13688(2023.11.20.)호	‘23.11.20.	김춘수 과장 양현옥 팀장 강민학 주무관
○ 여수 석보 주변정비 소규모재해영향평가용역 계약체결 및 감독공무원 알림 ※회계과-60343(2023.11.30.)호	‘23.11.30.	정서인 과장 최철웅 팀장 한진숙 주무관
○ 2022년 문화재보수정비(총액계상)사업 여수 석보(사적) 주변정비 설계보완 요청 ※문화재청 수리기술과-6263(2023.12.06.)호	‘23.12.06.	조규형 팀장 정환진 주무관
○ 2023년 하반기 여수 석보 환경정비사업 계약의뢰 ※문화유산과-14657(2023.12.08.)호	‘23.12.08.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김종학 주무관
○ 2023년 하반기 여수 석보 환경정비사업 계약체결 및 감독공무원 알림 ※회계과-63287(2023.12.12.)호	‘23.12.12.	한진숙 과장 김진욱 팀장 정서인 주무관
○ 2023년 하반기 여수 석보 환경정비사업 준공계 제출 ※문화유산과-15264(2023.12.20.)호	‘23.12.20.	양현옥 팀장 김종학 주무관

○ 2022년 문화재보수정비(총액계상)사업 여수 석보(사적) 주변정비 설계 보완 제출 ※문화유산과-83(2024.01.03.)호	’24. 1. 3.	김춘수 과장 양현옥 팀장 강민학 주무관
○ 여수 석보 주변정비 소규모재해영향평가 일시정지 검토보고 ※문화유산과-99(2024.01.03.)호	’24. 1. 3.	김춘수 과장 양현옥 팀장 강민학 주무관
○ 여수 석보 주변정비 소규모재해영향평가 일시정지 요청 ※문화유산과-114(2024.01.03.)호	’24. 1. 3.	김춘수 과장 양현옥 팀장 강민학 주무관
○ 여수 석보 주변정비 소규모재해영향평가 일시정지 알림 ※회계과-671(2024.01.04.)호	’24. 1. 5.	한진숙 과장 최철웅 팀장 정서인 주무관
○ 2023년 문화재보수정비(총액계상)사업 여수 석보(사적) 주변정비 설계 보완(2차) 요청 ※문화재청 수리기술과-320(2024.01.18.)호	’24. 1. 26.	조규형 과장 정환진 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업 실시설계용역 일시정지 검토보고 ※문화유산과-805(2024.01.19.)호	’24. 1. 19.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업 실시설계용역 일시정지 요청 ※문화유산과-811(2024.01.19.)호	’24. 1. 19.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업 실시설계용역 일시정지 알림 ※문화유산과-3358(2024.01.19.)호	’24. 1. 19.	강행숙 과장 우희원 팀장 이정란 주무관
○ 여수 석보 주변정비 소규모재해영향평가 협의 요청 ※문화유산과-2754(2024.03.04.)호	’24. 3. 4.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비 소규모재해영향평가 협의 회신 ※안전총괄과-4767(2024.03.05.)호	’24. 3. 5.	박희우 과장 박상진 팀장 임영수 주무관
○ 2022년 문화재보수정비(총액계상)사업 여수 석보(사적) 주변정비 설계 보완(2차) 제출 ※문화유산과-3219(2024.03.13.)호	’24. 3. 13.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 일시정지 중인 사업의 준공 예정일 제출 요청(여수 석보 주변 정비사업 실시설계용역) ※회계과-14540(2024.03.25.)호	’24. 3. 25.	강행숙 과장 우희원 팀장 이정란 주무관
○ 2022년 국가유산 보수정비사업 지침변경 승인(여수 석보 주차장 조성 및 주변정비 설계) ※문화재청 보존정책과-1871(2024.04.04.)호	’24. 4. 4.	김명준 과장 최신영 팀장 조선희 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업 재해영향평가 대상 여부 검토 요청 ※문화유산과-4426(2024.04.08.)호	’24. 4. 8.	박소영 팀장(대결) 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업 재해영향평가 등의 협의대상 검토 회신 ※안전총괄과-7754(2024.04.11.)호	’24. 4. 11.	박희우 과장 박상진 팀장 임영수 주무관
○ 2022년 문화재보수정비(총액계상)사업 여수 석보(사적) 주변정비 조건부 설계승인 통지(주차장 조성 등) ※문화재청 수리기술과-1967(2024.04.16.)호	’24. 4. 16.	심동준 과장 정환진 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업 개발행위 및 농지전용 허가 대상 검토 요청 ※문화유산과-5715(2024.05.08.)호	’24. 5. 8.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업 개발행위 및 농지전용 허가 대상 검토 요청 ※문화유산과-5715(2024.05.08.)호	’24. 5. 8.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 일시정지 중인 사업의 준공 예정일 제출 요청에 따른 회식(여수 석보) ※문화유산과-5801(2024.05.09.)호	’24. 5. 9.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 일시정지 중인 사업의 선금보증서 갱신(기간연장) 안내(여수 석보 주변 정비사업 실시설계용역) ※회계과-24379(2024.05.13.)호	’24. 5. 13.	강행숙 과장 우희원 팀장 이정란 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업 개발행위 및 농지전용 허가 대상 검토 요청 회신 ※도시계획과-11635(2024.05.14.)호	’24. 5. 14.	이영호 과장 최상록 팀장 최훈중 주무관
○ 2022년 문화재보수정비(총액계상)사업 여수 석보(사적) 주변정비 조건부 설계승인에 따른 보완 제출 ※문화유산과-5959(2024.05.14.)호	’24. 5. 14.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 출장결과보고서(여수 석보 주변정비사업 집행점검에 따른 현장방문) ※문화유산과-6063(2024.05.16.)호	’24. 5. 16.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 토지이동(지목변경) 신청 ※문화유산과-6600(2024.05.29.)호	’24. 5. 29.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비 소규모 재해영향평가용역 일시정지 해지 및 설계변경 검토보고 ※문화유산과-6647(2024.05.29.)호	’24. 5. 29.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비 소규모 재해영향평가용역 일시정지 해지 및 변경계약 요청 ※문화유산과-6660(2024.05.30.)호	’24. 5. 30.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비 소규모재해영향평가용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※회계과-28335(2024.05.30.)호	’24. 5. 30.	김남영 팀장(대결) 우희원 팀장 이정란 주무관
○ 국유재산 사용허가 신청(여수 석보 주변정비사업) ※문화유산과-6969(2024.06.05.)호	’24. 6. 5.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비공사 계약심사 의뢰 ※문화유산과-7126(2024.06.10.)호	’24. 6. 10.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비 소규모재해영향평가용역 준공계 제출 ※문화유산과-7148(2024.06.10.)호	’24. 6. 10.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비공사 계약심사 보완 요청 ※감사담당관-6010(2024.06.11.)호	’24. 6. 11.	정웅정 과장 이재태 팀장 오차영 주무관
○ 여수 석보 주변정비공사 소규모재해영향평가용역 준공검사공무원 지정 알림 ※회계과-31540(2024.06.17.)호	’24. 6. 17.	고영백 팀장(대결) 우희원 팀장 이지향 주무관
○ 여수 석보 주변정비공사 소규모재해영향평가용역 준공검사조서 제출 ※문화유산과-7463(2024.06.17.)호	’24. 6. 17.	조정만 과장 박소영 팀장(공가) 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비공사 계약심사 보완사항 제출 ※문화유산과-8086(2024.06.25.)호	’24. 6. 25.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 사적 여수 석보 문화유산 안내판 정비 ※문화유산과-8724(2024.07.04.)호	’24. 7. 4.	조정만 과장 박소영 팀장 손인희 주무관
○ 사적 여수 석보 문화유산 안내판 정비(변경) ※문화유산과-8752(2024.07.05.)호	’24. 7. 5.	조정만 과장 박소영 팀장 손인희 주무관
○ 여수 석보 주변정비공사 계약심사 결과 회신 ※감사담당관-7077(2024.07.05.)호	’24. 7. 5.	정웅정 과장 이재태 팀장 오차영 주무관
○ 여수 석보 주변정비공사(주차장 조성) 시행 ※문화유산과-339(2024.07.15.)호	’24. 7. 15.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비공사(주차장 조성) 계약의뢰 ※문화유산과-342(2024.07.15.)호	’24. 7. 15.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비공사(주차장 조성) 입찰 공고 ※회계과-38855(2024.07.16.)호	’24. 7. 16.	강행숙 과장 양동안 팀장 이정란 주무관
○ 2024년 여수 석보 내 환경정비사업 추진 ※문화유산과-688(2024.07.22.)호	’24. 7. 22.	조정만 과장 박소영 팀장 이영훈 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 비상주감리용역 시행 ※문화유산과-694(2024.07.22.)호	’24. 7. 22.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 비상주감리용역 계약의뢰 ※문화유산과-715(2024.07.22.)호	’24. 7. 22.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 폐기물처리용역 계약심사 의뢰 ※문화유산과-739(2024.07.22.)호	’24. 7. 22.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 2024년 여수 석보 내 환경정비사업(예초) 계약의뢰 ※문화유산과-782(2024.07.23.)호	’24. 7. 23.	조정만 과장 박소영 팀장 이영훈 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 폐기물처리용역 계약심사 결과 회신 ※감사담당관-7807(2024.07.24.)호	’24. 7. 24.	정웅정 과장 이재태 팀장 송수진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 폐기물처리용역 시행 ※문화유산과-934(2024.07.25.)호	’24. 7. 25.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 2024년도 국가유산보수정비 국고보조사업 지침 변경 승인(여수 석보 주차장 조성 사업) ※국가유산청 역사유적과-1274(2024.07.29.)호	’24. 7. 29.	김명준 과장 최신영 팀장 조선희 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 낙찰자 결정 알림 ※회계과-41298(2024.07.30.)호	’24. 7. 30.	김병완 국장 강행숙 과장 양동안 팀장 이정란 주무관
○ 2024년도 국가유산보수정비 국고보조사업 지침 변경 승인 알림(여수 석보 주차장 조성 사업) ※국가유산청 역사유적과-1275(2024.07.30.)호	’24. 7. 30.	김명준 과장 최신영 팀장 조선희 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※회계과-41530(2024.07.30.)호	’24. 7. 30.	김병완 국장 강행숙 과장 양동안 팀장 이정란 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 비상주 감리용역 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※회계과-42003(2024.08.02.)호	’24. 8. 2.	김남영 팀장(대결) 정일권 팀장 이지향 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 착공계 제출 ※문화유산과-1431(2024.08.06.)호	’24. 8. 6.	조정만 과장 박소영 팀장(공석) 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 비상주 감리용역 착수계 제출 ※문화유산과-1454(2024.08.06.)호	’24. 8. 6.	조정만 과장 박소영 팀장(공석) 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변 정비사업(주차장 조성) 관급자재(잔디블록) 단가 정정 제출 ※문화유산과-1471(2024.08.06.)호	’24. 8. 6.	조정만 과장 박소영 팀장(공석) 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 폐기물처리용역 수의견적 제출 안내 공고 ※회계과-43232(2024.08.09.)호	’24. 8. 9.	강행숙 과장 양동안 팀장 이지향 주무관
○ 지적 경계측량 요청(여수 석보 주변정비사업) ※문화유산과-2045(2024.08.19.)호	’24. 8. 19.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 폐기물처리용역 계약체결 및 감독공무원 알림 ※회계과-45528(2024.08.26.)호	’24. 8. 26.	강행숙 과장 양동안 팀장 이지향 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 폐기물처리용역 착수계 제출 ※문화유산과-2466(2024.08.27.)호	’24. 8. 27.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 지적측량 완료 및 수수료 청구(여수 석보 주변정비사업) ※한국국토정보공사 여수지사-3545(2024.09.05.)호	’24. 9. 5.	정종표 지사장 손동진 수석팀장(출장) 김정우 주임
○ 지적측량 수수료 집행(여수 석보 주변정비사업) ※문화유산과-3070(2024.09.06.)호	’24. 9. 6.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 구역 내 주차금지 안내 현수막 제작 ※문화유산과-3355(2024.09.11.)호	’24. 9. 11.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 출장결과보고서(여수 석보 주변정비사업) ※문화유산과-3764(2024.09.23.)호	’24. 9. 23.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 석면 조사용역 시행 ※문화유산과-3768(2024.09.24.)호	’24. 9. 24.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 실시설계용역 일시정지 해지 검토보고 ※문화유산과-3913(2024.09.25.)호	’24. 9. 25.	정재호 국장 조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 실시설계용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※회계과-50706(2024.09.26.)호	’24. 9. 26.	김병완 국장 강행숙 과장 양동안 팀장 이지향 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 현장 실정사항 검토보고 ※문화유산과-4030(2024.09.27.)호	’24. 9. 27.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 실시설계용역 완료계 제출 ※문화유산과-4057(2024.09.27.)호	’24. 9. 27.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 실시설계용역 준공검사공무원 지정 알림 ※회계과-51028(2024.09.27.)호	’24. 9. 27.	강행숙 과장 양동안 팀장 이지향 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 실시설계용역 준공검사조서 제출 ※문화유산과-4192(2024.10.02.)호	’24. 10. 2.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업에 따른 건축물 해체 신고서 제출 ※문화유산과-4233(2024.10.02.)호	’24. 10. 2.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 지정폐기물 해체 및 처리용역 시행 ※문화유산과-4234(2024.10.02.)호	’24. 10. 2.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 지정폐기물 해체 및 처리용역 계약의뢰 ※문화유산과-4235(2024.10.02.)호	’24. 10. 2.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 등 3건 공사기간 연장 검토보고 ※문화유산과-4480(2024.10.10.)호	’24. 10. 10.	정재호 국장 조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 등 3건 공사기간 연장 요청 ※문화유산과-4511(2024.10.10.)호	’24. 10. 10.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 변경계약 체결 알림 ※회계과-53219(2024.10.11.)호	’24. 10. 11.	한진숙 과장(대결) 강행숙 과장 양동안 팀장 이지향 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 지정폐기물 해체 및 처리 계약체결 및 감독공무원 알림 ※회계과-53031(2024.10.11.)호	’24. 10. 11.	강행숙 과장 양동안 팀장 이지향 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 폐기물처리용역 변경계약 체결 알림 ※회계과-53452(2024.10.14.)호	’24. 10. 14.	강행숙 과장 양동안 팀장 이정란 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 지정폐기물 해체 및 처리 착수계 제출 ※문화유산과-4701(2024.10.14.)호	’24. 10. 14.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 주차장 조성 건설재해예방 기술지도용역 시행 ※문화유산과-5040(2024.10.21.)호	’24. 10. 21.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 비상주 감리용역 변경계약 체결 알림 ※문화유산과-5040(2024.10.21.)호	’24. 10. 23.	강행숙 과장 양동안 팀장 이지향 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 현장 실정사항 검토보고(2차) ※문화유산과-5225(2024.10.24.)호	’24. 10. 24.	정재호 국장 조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 납품확인서 제출의 건 ※문화유산과-5301(2024.10.25.)호	’24. 10. 25.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업 지정폐기물 해체 및 처리 준공계 제출 ※문화유산과-5380(2024.10.28.)호	’24. 10. 28.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관
○ 여수 석보 주변정비사업(주차장 조성) 납품확인서 제출(측구수로관) ※문화유산과-5392(2024.10.28.)호	’24. 10. 28.	조정만 과장 박소영 팀장 임선진 주무관