정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	진남관 보수정비사업
② 추진배경	2004년부터 국보 제304호인 여수 진남관의 안전모니터링 결과 건물의 노후화로 구조적인 문제 등이 발생하여 건물의 안전한 보존을 위하여 해체·보수 결정
③ 사업개요	○ 사 업 명 : 진남관 보수정비 사업 ○ 사업기간 : 2013. ~ 2024.(12개년) ○ 사 업 비 : 194.7억 원(국비 136.2 도비 21.3 시비 37.2) ○ 사업내용 : 가설덧집 설치, 진남관 해체ㆍ복원, 주변정비 등 ○ 추진방법 : 국가유산청 기술지도사업으로 추진
④ 사업부서	여수시 문화유산과		⑤ 담당자	시설7급 김주희 행정5급 조정만
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간	`13. 7. ~ `24. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 진남관 보수ㆍ정비사업 실시 설계용역 착수 ※ 문화예술과-1054호		‘13.07.23.	신지영 과장 정수만 팀장 윤창열 주무관
○ 문화재청 설계 승인 ※ 문화재청 수리기술과-5064호		‘14.11.21.	문화재청 문화재보존국 강경환 문화재보존국장 정영훈 수리기술과장 김상규 시설사무관 허창학 주무관
○ 진남관 보수정비공사(전기, 소방,통신) 계약 ※ 회계과-33235호		‘15.07.27. ~ 28.	김재일 과장 김인옥 팀장 정아영 주무관
○ 진남관 보수정비공사(건축)계약 ※ 회계과-49637호		‘15.11.26.	김병완 과장 김인옥 팀장 정아영 주무관
○ 진남관 보수정비공사(감리) 계약 ※ 회계과-50026호		‘15.12.01.	김병완 과장 김인옥 팀장 정아영 주무관

○ 공사 착공	‘15.12.09.	김병완 과장 김인옥 팀장 정아영 주무관
○ 진남관 보수정비공사 시굴조사 ※ 문화예술과-9378호	‘16.05.11.	김병완 과장 김인옥 팀장 정아영 주무관
○ 공사중지(시굴조사 관련 자문 회의 의견 반영) ※ 회계과-25766호	‘16.05.30.	김병완 과장 김인옥 팀장 정아영 주무관
○ 공사중지 해제 및 설계변경 완료에 따른 공사재개 ※ 회계과-26809호	‘17.05.23.	하봉영 과장 고형성 팀장 김희영 주무관
○ 진남관 보수정비사업 2차분 발주 (공사기간 : `18.4.27. ~ `19. 4.21.) ※ 회계과-18341호	‘18.04.09.	하봉영 과장 고형성 팀장 김희영 차장
○ 진남관 보수정비사업 1차분 준공 ※ 회계과-21020호	‘18.04.27.	하봉영 과장 고형성 팀장 김희영 차장
○ 진남관 건물지 시굴조사 용역 ※ 회계과-4128호	‘19.01.30.	하봉영 과장 김인옥 팀장 김희영 차장
○ 진남관 보수정비사업(건축공사) 2차분 일시정지 ※ 회계과-5819호	‘19.02.13.	하봉영 과장 김인옥 팀장 김희영 차장
○ 진남관 해체부재 재사용을 위한 조사 용역 계약체결 ※ 회계과-12371호	‘19.03.21.	하봉영 과장 김인옥 팀장 김희영 차장
○ 진남관 보수정비사업(건축공사) 총괄 및 2차분 변경계약체결 (물가변동반영) ※ 회계과-15689호	‘19.04.05.	하봉영 과장 김인옥 팀장 김희영 차장
○ 진남관 건물지 시굴조사 용역 준공 ※ 회계과-18584호	‘19.05.01.	하봉영 과장 김인옥 팀장 김희영 차장
○ 진남관 초석 재사용을 위한 조사 용역 계약체결 ※ 회계과-27211호	‘19.05.24.	하봉영 과장 김인옥 팀장 김희영 차장
○ 진남관 건물지 정밀발굴조사 용역 ※ 회계과-34494호	‘19.07.04.	김지선 과장 김인옥 팀장 김희영 차장
○ 진남관 초석 재사용을 위한 조사 용역 준공 ※ 회계과-37031호	‘19.08.01.	김지선 과장 김인옥 팀장 김희영 차장

○ 진남관 해체부재 재사용을 위한 조사 용역 준공 ※ 회계과-37792호	‘19.08.06.	김지선 과장 김인옥 팀장 김희영 차장
○ 진남관 건물지 정밀발굴조사 용역 변경계약 체결(기간연장) ※ 회계과-49894호	`19.10.04.	김지선 과장 김인옥 팀장 김희영 차장
○ 진남관 보수정비사업(감리) 총괄 및 2차분 변경계약체결(기간연장) ※ 회계과-59725호	`19.11.22.	김지선 과장 김인옥 팀장 김희영 차장
○ 진남관 건물지 정밀발굴조사 용역 준공 ※ 회계과-62426호	`19.12.04.	김지선 과장 김인옥 팀장 김희영 차장
○ 진남관 보수정비사업 설계변경 실시설계용역 계약체결 ※ 회계과-5564호	`20.02.04.	김지선 과장 김희영 팀장 안준성 주무관
○ 진남관 보수정비사업 기술지도단 회의 개최 ※ 문화예술과-4917호	`20.03.09.	김지선 과장 김희영 팀장 안준성 주무관
○ 진남관 보수정비사업 설계변경 실시설계용역 변경계약체결 ※ 문화예술과-17774호	`20.03.27.	김지선 과장 김희영 팀장 안준성 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역 변경계약체결(기간연장) ※ 회계과-20316호	`20.04.08.	김지선 과장 김희영 팀장 안준성 주무관
○ 진남관 복원평면 변경을 위한 원형고증 연구용역 계약체결 ※ 회계과-20333호	`20.04.08.	김지선 과장 김희영 팀장 안준성 주무관
○ 진남관 복원평면 변경을 위한 원형고증 연구용역 중간보고회 개최 ※ 문화예술과-10953호	`20.05.13.	김지선 과장 김희영 팀장 안준성 주무관
○ 진남관 복원평면 변경을 위한 원형고증 연구용역 최종보고회 개최 ※ 문화예술과-12253호	`20.05.27.	김지선 과장 김희영 팀장 안준성 주무관
○ 진남관 보수정비사업 기술지도단 회의 개최 ※ 문화예술과-12371호	`20.05.28.	김지선 과장 김희영 팀장 안준성 주무관
○ 진남관 보수정비사업 설계변경 승인 ※ 문화재청 수리기술과-2618호	`20.06.12.	이정연 수리기술과장 김재길 기술서기관 김봉두 주무관
○ 진남관 복원평면 변경을 위한 원형고증 연구용역 완료 ※ 회계과-32207호	`20.06.15.	김지선 과장 김희영 팀장 안준성 주무관

○ 진남관 보수정비사업 일시정지 해지 및 변경계약 ※회계과-42237호	`20.07.17.	김지선 과장 황여진 팀장 강한빛 주무관
○ 진남관 보수정비사업 기술지도단(건축) 자문회의 결과 보고 ※문화예술과-23722호	`20.10.14.	김학섭 국장 김지선 과장 황여진 팀장 강한빛 주무관
○ 진남관 보수정비사업 기술지도단(보존처리) 자문회의 결과 보고 ※문화예술과-521호	`21.01.07.	김학섭 국장 김지선 과장 황여진 팀장 강한빛 주무관
○ 진남관 보수정비사업 기술지도단(건축) 자문회의 결과 보고 ※문화예술과-3143호	`21.02.08.	김학섭 국장 고영준 과장 황여진 팀장 지상훈 차장
○ 진남관 건물지 정밀 발굴조사(2차) 계약체결 ※회계과-16363호	`21.04.05.	고영준 과장 황여진 팀장 지상훈 차장
○ 진남관 건물지 정밀 발굴조사(2차) 착수신고 ※문화예술과-10318호	`21.05.04.	고영준 과장 황여진 팀장 지상훈 차장
○ 진남관 보수정비사업 기술지도단 회의 개최 결과보고 ※ 문화예술과-13440호	`21.06.09.	김학섭 국장 고영준 과장 황여진 팀장 지상훈 차장
○ 진남관 보수정비사업(설계변경) 실시설계 용역 계약체결 ※ 회계과-33921호	`21.06.25.	고영준 과장 황여진 팀장 지상훈 차장
○ 진남관 건물지 정밀 발굴조사(2차) 검수공무원 지정 ※회계과-36049호	`21.07.05.	고영준 과장 황여진 팀장 신아름 주무관
○ 진남관 초석 규격 대량 검토를 위한 정밀 해석 용역 변경계약 체결 ※회계과-50141호	`21.10.08.	고영준 과장 황여진 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 초보수정비사업 기술지도단 자문의견에 대한 조치결과 제출 ※문화예술과-26182호	`21.11.02.	고영준 과장 황여진 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 초석 규격 대량 검토를 위한 정밀해석 준공검사 공무원 지정 ※회계과-56300호	`21.11.15.	고영준 과장 황여진 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수 정비사업(건축) 3회 기성대가 확정 알림 ※회계과-65389호	`21.12.27.	고영준 과장 황여진 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수 정비사업(2차분) 공사기간 검토보고 ※문화예술과-1907호	`22.01.23.	나병곤 국장 고영준 과장 황여진 팀장 김주희 주무관

○ 진남관 보수정비사업(건축공사 2차분) 변경계약 의뢰 ※ 문화예술과-1943호	‘22.01.24.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업(건축공사) 2차분 변경계약 ※ 회계과-4252호	`22.01.26.	김용필 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 김순미 주무관
○ 여수진남관 해체보수공사 설계변경(5차)보완설계도서 제출 요청 ※ 문화재청 수리기술과-1097호	`2203.07.	송봉규 사무관 지문근 주무관
○ 여수 진남관 보수정비사업 설계변경(5차) 승인 요청 ※ 문화예술과-7137호	`22.03.30.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 여수 진남관 보수정비사업 설계변경(5차) 승인 ※ 문화재청 수리기술과-1603호	`22.04.01.	조은경 과장 송봉규 사무관 지문근 주무관
○ 진남관 보수정비사업(총괄, 2, 3차분)변경계약 의뢰 ※ 문화예술과-8392호	`22.04.13.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업(총괄, 2, 3 차분)변경계약 사항 통보 ※ 회계과-17969호	`22.04.18.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ 진남관 보수정비사업 설계변경 실시설계용역 일시정지 해제요청 ※ 문화예술과-9036호	`22.04.21.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 설계변경 실시설계용역 일시정지 해제 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-19045호	`22.04.22.	조계윤 과장 김진욱 팀장 박윤희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역의 물가변동에 따른 검토요청 ※ 회계과-20058호	`22.04.28.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ 진남관 보수정비사업(설계변경) 실시설계용역 준공검사 공무원 지정 알림 ※ 회계과-20294호	`22.04.28.	조계윤 과장 김진욱 팀장 박윤희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역 물가변동 검토용역 시행 ※ 문화예술과-9073호	`22.04.29.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역 물가변동 검토용역 계약 ※ 문화예술과-11420호	`22.05.26.	조계윤 과장 오병구 팀장 박윤희 주무관

○ 진남관 보수정비사업 기술지도회의 개최 ※ 문화예술과-11420호	`22.05.31.	조계윤 과장 오병구 팀장 박윤희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역 물가변동 검토용역 ※ 문화예술과-13928호	`22.06.22.	조계윤 과장 오병구 팀장 박윤희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용 역(2차분) 3회 기성 검사 ※ 문화예술과-14136호	`22.06.23.	김용필 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 김순미 주무관
○ 여수 진남관 보수정비사업 자문회의 개최 ※ 문화예술과-13929호	`22.06.29.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 여수 진남관 보수정비사업 자문회의 개최 ※ 문화예술과-18776호	`22.08.24.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역 변경계약(기간연장) ※ 회계과-44348호	`22.09.16.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 진남관 보수정비사업 설계변경승인 ※ 문화예술과-26778호	`22.11.17.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 변경계약 ※ 회계과-60136호	`22.12.14.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토용역 계약 ※ 회계과-2842호	`23.01.30.	한진숙 과장 최철웅 팀장 박윤희 주무관
○ 진남관 중수 상량식 거행 ※ 문화유산과-1885 호	`23.03.01.	정기명 시장 김종기 부시장 김용필 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 여수 진남관 보수정비사업 기술지도회의 실시 ※ 문화유산과-1817호	`22.02.28.	엄태오 팀장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 현장 공개 재개 ※ 문화유산과-2812호	`23.03.23.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 2차분 변경 계약 사항 통보 ※ 회계과-21720호	`23.05.15.	이동일 과장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관

○ 여수 진남관 보수정비사업 전문가 자문회의 알림 ※ 문화유산과-5129호	`23.05.16.	엄태오 팀장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 실시설계변경 용역 시행 ※ 문화유산과-659	`23.06.16.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역변경계약 의뢰 ※ 문화유산과-6907호	`23.06.22.	양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 실시설계변경 용역 계약체결 ※ 회계과-30375호	`23.06.23.	한진숙 과장 최철웅 팀장 박윤희 주무관
○ 진남관 보수 정비사업(3차분) 2회 기성검사조서 제출 ※ 문화윳나과-7128호	`23.06.27.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수 정비사업(3차분) 2회 기성대가 확정 ※ 회계과-31324호	`23.06.27.	한광민 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역(총괄 및 2차분) 변경계약 ※ 회계과-31393호	`23.06.28.	한광민 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 여수 진남관 보수정비사업 자문회의 개최 ※ 문화유산과-7294호	`22.06.29.	엄태오 팀장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역 기성검사조서 제출 ※ 문화유산과-7297호	`22.06.29.	엄태오 팀장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수 정비사업 감리용역(2차분) 5회 기성대가 확정 ※ 회계과-32088호	`23.06.30.	한광민 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 진남관 보수정비사업 변경계약(기간 연장) 의뢰 ※ 문화유산과-8966호	`23.08.04.	엄태오 팀장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 실시설계변경 용역 기간 연장 의뢰 ※ 문화유산과-9085호	`23.08.08.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 실시설계변경 용역 변경계약 체결 ※ 회계과-39356호	`23.08.08.	한진숙 과장 최철웅 팀장 정서인 주무관
○ 진남관 보수정비사업(2, 3차분) 변경계약 ※ 회계과-39747호	`23.08.11.	한진숙 과장 최철웅 팀장 장규현 주무관

○ 여수 진남관 해체보수 설계변경 승인 요청 ※ 문화유산과-10419호	`23.09.05.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 실시설계변경 용역 일시정지 요청 ※ 문화유산과-10426호	`23.09.05.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 실시설계변경 용역 일시정지 ※ 회계과-39747호	`23.09.06.	한진숙 과장 최철웅 팀장 정서인 주무관
○ 진남관 보수정비사업(2, 3차) 설계변경 및 변경계약 의뢰 ※ 문화유산과-8966호	`23.09.27.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업(2, 3차) 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-49167호	`23.10.06.	한광민 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 장규현 주무관
○ 진남관 보수정비사업(2차분) 준공계 제출 ※ 문화유산과-11831호	`23.10.11.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업(2차분) 준공검사 결과 통보 ※ 문화유산과-12159호	`23.10.17.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 조건부 설계변경(7차) 승인 통지 ※ 문화재청 수리기술과-5409호	`23.10.25.	문화재청 김재길 과장 조규형 서기관 정환진 주무관
○ 여수 진남관 보수정비사업' 설계변경도서 보완 제출 ※ 문화유산과-13043호	`23.11.06.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 실시설계변경 용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 ※ 회계과-55272호	`23.11.07.	한진숙 과장 최철웅 팀장 정서인 주무관
○ 진남관 보수정비사업 실시설계변경 용역 준공계 제출 ※ 문화유산과-13121호	`23.11.10.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 실시설계변경 용역 검사 결과 제출 ※ 문화유산과-13533호	`23.11.15.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 가연성폐기물 처리용역 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-12954	`23.11.27.	정웅정 과장 이재태 팀장 송수진 주무관

○ 진남관 보수정비사업(총괄, 3차분) 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-60646호	`23.12.01.	한광민 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 이정란 주무관
○ 진남관 보수정비사업 가연성폐기물 처리용역 계약체결 ※ 회계과-64698호	`23.12.18.	한진숙 과장 최철웅 팀장 이정란 주무관
○ 진남관 보수정비사업 가연성폐기물 처리계획 신고 ※ 문화유산과-15073호	`23.12.18.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 여수 진남관 보수정비사업' 현장자문 실시 알림 ※ 문화유산과-14738호	`23.12.19.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 가연성폐기물 처리용역 착수 ※ 문화유산과-15073호	`23.12.20.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역(2차분) 기성검사 결과 제출 ※ 문화유산과-15350호	`23.12.21.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업(3차분) 기성검사 결과 제출 ※ 문화유산과-15535호	`23.12.26.	김춘수 과장 양현옥 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 불연성 폐기물 처리용역 일상감사 및 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-614호	`24.01.18.	정웅정 과장 이재태 팀장 송수진 주무관
○ 진남관 보수정비사업(3차분) 변경계약 체결 ※ 회계과-5103호	`24.01.30.	김병완 국장 강행숙 과장 우희원 팀장 이정란 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역 변경계약 체결 ※ 회계과-5518호	`24.02.01.	김병완 국장 강행숙 과장 우희원 팀장 이정란 주무관
○ 진남관 보수정비사업 불연성 폐기물 처리 용역 계약체결 ※ 회계과-9089호	`24.02.26.	김병완 국장 강행숙 과장 우희원 팀장 이정란 주무관
○ 진남관 보수정비사업 실정 보고에 대한 검토의견 회신 ※ 문화유산과-4688호	`24.04.15.	조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 자문 결과 보고 ※ 문화유산과-5410호	`24.04.30.	나병곤 국장 조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관

○ 진남관 보수정비사업 실시설계변경 용역 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-4602호	`24.04.30.	정웅정 과장 이재태 팀장 송수진 주무관
○ 진남관 해체부재 ‘여수 석보’ 내 임시보관 계획 ※ 문화유산과-6202호	`24.05.21.	조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 설계변경 용역 계약체결 ※ 회계과-26699호	`24.05.23.	강행숙 과장 우희원 팀장 이정란 주무관
○ 진남관 보수정비사업 물가 변동 검토 용역 계약체결 ※ 회계과-28836호	`24.06.03.	강행숙 과장 우희원 팀장 김하은 주무관
○ 진남관 보수정비사업 변경계약 체결 ※ 회계과-30311호	`24.06.11.	김병완 국장 강행숙 과장 우희원 팀장 이정란 주무관
○ 진남관 보수정비사업 기술지도 결과 보고 ※ 문화유산과-7745호	`24.06.21.	나병곤 국장 조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관
○ 2024년 제7회 여수시 건축구조 전문위원회 개최 결과 알림 ※ 허가과-24174호	`24.06.21.	배영노 팀장 한태광 팀장 정은주 주무관
○ 진남관 보수정비사업 해체공사감리 용역 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-6433호	`24.06.21.	오병구 팀장 이재태 팀장 송수진 주무관
○ 진남관 보수정비사업(3차분) 4회 기성검사 결과 제출 ※ 문화유산과-8238호	`24.06.26.	조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관
○ 건축물 해체허가 알림 ※ 허가과-24746호	`24.06.26.	김인옥 과장 김희영 팀장 이다애 주무관
○ 해체공사 감리자 지정 통보 ※ 허가과-24747호	`24.06.26.	김인옥 과장 김희영 팀장 김무교 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역 7회 기성검사 결과 제출 ※ 문화유산과-8316호	`24.06.26.	조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관
○ 국가지정문화유산 현상변경 허가 알림(여수 석보 내 가설건축물 설치 등) ※ 문화유산과-8520호	`24.07.02.	조정만 과장 엄태오 팀장 정세영 주무관
○ 진남관 보수정비사업 해체공사 감리 용역 계약 체결 ※ 회계과-36043호	`24.07.02.	강행숙 과장 우희원 팀장 이정란 주무관

○ 건축물 해체공사 착공신고서 제출 ※ 문화유산과-8671호	`24.07.04.	조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 물가 변동 검토 용역 검사 결과 제출 ※ 문화유산과-52호	`24.07.09.	조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 감리용역 변경계약 체결 ※ 회계과-38292호	`24.07.12.	김병완 국장 강행숙 과장 양동안 팀장 이정란 주무관
○ 진남관 보수정비사업 불연성 폐기물 처리 용역 변경계약 체결 ※ 회계과-39400호	`24.07.19.	강행숙 과장 우희원 팀장 이정란 주무관
○ 진남관 보수정비사업 실정보고건(물가 변동) 검토 회신 ※ 문화유산과-632호	`24.07.19.	조정만 과장 김주희 주무관
○ 폐기물처리 계획 변경 신고 ※ 문화유산과-1110호	`24.07.30.	조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 해체공사감리 용역 계약변경 검토 보고 ※ 문화유산과-2649호	`24.08.30.	정재호 국장 조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 해체공사감리 용역 변경계약 ※ 회계과-46791호	`24.09.02.	강행숙 과장 양동안 팀장 이정란 주무관
○ 2024년 여수 진남관 해체보수 설계변경승인 통지 ※ 국가유산청 수리기술과-2626호	`24.09.23.	국가유산청 심동준 사무관 장기순 주무관
○ 진남관 보수정비사업(총괄, 3차) 설계변경 검토 보고 ※ 문화유산과-4063호	`24.09.27.	정기명 시장 정재호 국장 조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 변경계약 체결 ※ 회계과-51478호	`24.10.02.	김병완 국장 강행숙 과장 양동안 팀장 이정란 주무관
○ 진남관 보수정비사업 해체공사 감리 용역 검사 결과 제출 ※ 문화유산과-4383호	`24.10.07.	조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 설계변경 용역 계약변경 검토 보고 ※ 문화유산과-5170호	`24.10.23.	정재호 국장 조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관

○ 진남관 보수정비사업 가연성폐기물 처리용역 계약기간 연장 검토 보고 ※ 문화유산과-5243호	`24.10.24.	정재호 국장 조정만 과장 박소영 팀장 김주희 주무관
○ 진남관 보수정비사업 설계변경 용역 변경계약 체결 ※ 회계과-55723호	`24.10.24.	강행숙 과장 양동안 팀장 이정란 주무관
○ 진남관 보수정비사업 가연성폐기물 처리용역 변경계약 체결 ※ 회계과-56081호	`24.10.28.	강행숙 과장 양동안 팀장 이정란 주무관