특수공시 사업 목록

(2023. 12. 31. 기준 / 단위 : 억 원)

사 업 명		총사업비	부 서 명	비 고
1.	남면사무소 신축공사	51	회계과	‘23. 11. 준공
2.	K-관광 섬 조성사업	110	관광과
3.	조명연합수군 테마 관광자원 개발사업	96	관광과	‘23. 12. 준공
4.	사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업	173	관광과
5.	여수시립박물관 건립	293	문화유산과
6.	진남관 보수정비사업	195	문화유산과
7.	여수시 어린이도서관 건립	130	도서관운영과
8.	원도심권 노인복지관 건립사업	119	노인장애인과
9.	웅천국민체육센터 건립공사	106	체육지원과
10.	수산물 청정위판장 건립사업	70	수산경영과	‘24. 6. 준공
11.	남산공원 2단계 조성사업	96	공원과	‘23. 12. 준공
12.	장기미집행 공원 조성(무선산공원, 자산공원)	400	공원과
13.	연등천 재해예방사업	389	건설과
14.	소제지구 택지개발사업	2,150	공영개발과
15.	경도 해양관광단지 진입도로 개설	1,340	도로과
16.	수산시장3 주차전용건축물 신축공사	91	주차차량과	‘23. 3. 준공
17.	화장동 공영주차장(타워) 신축공사	117	주차차량과	‘24. 1. 준공
18.	학용정수장 고도정수처리시설 설치	213	상수도과	‘23. 10. 준공
19.	지방상수도 현대화 사업	513	상수도과
20.	문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사	97	하수도과	‘24. 5. 준공

01		남면사무소 신축공사

회계과 (☏ 061-659-3226)

실태		노후·협소 및 붕괴 위험으로 주민자치센터 운영·행정능률 저하
추진방향		노후된 기존 면사무소를 철거 후 신축
기대효과		주민복지 및 행정서비스의 질적 향상

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 남면 우학리 649-1번지

◦ 사업기간 : 2022. 7. 1. ～ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 지상3층/ 1동, 연면적 1,328.11㎡

◦ 사 업 비 : 5,077백만원(전액 시비)

◦ 공 정 율 : 100%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	50.77	48.46	2.31	-
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	50.77	48.46	2.31
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 남면사무소 신축 방침 결정	: ’20.  4.  16.

◦ 건축설계 공모	: ’21.  4.  27.

◦ 계약체결	: ’22.  6.  23.

◦ 착공	: ’22.  7.   1.

◦ 준공	: ’23. 11.  13.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

02		K-관광 섬 조성사업

관광과 (☏ 061-659-3864)

실태		중장년층 중심의 관광객 구조에서 벗어나 섬의 주민들과 고유 콘텐츠를 활용한 특화 콘텐츠 및 인프라 개발 필요
추진방향		거문도 역사‧문화‧생태 자원을 활용한 K관광 상품 개발 및 저탄소 관광을 위한 친환경 관광시설 조성
기대효과		주민 소득 향상, 일자리 창출을 통한 지역경제 발전 및 환경보전을 통한 지속 가능 관광 실현

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 삼산면 거문도 일원

◦ 사업기간 : 2023. 4. ∼ 2026. 12.

◦ 사업내용 : 거문도 특화 관광콘텐츠 개발 및 편의 개선을 위한 인프라 조성

◦ 사 업 비 : 110억원(국비 55, 도비 16.5, 시비 38.5)

◦ 공 정 율 : 60%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	110	-	-	110
국 비	55	-	-	55
도 비	16.5	-	-	16.5
시 비	38.5	-	-	38.5
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 문체부‧지자체 현장 컨설팅 추진	: ’23. 9. ~ 11.

◦ 2024년 전라남도 투자심사 자료 제출(조건부 2단계)  : ’24. 3. 20.

◦ K-관광 섬 육성 종합계획 수립	: ’24. 4. 8.

◦ 현지사무국 리모델링 및 K관광섬 테마로드 실시설계 용역  : ’24. 7. ~

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

03		조명연합수군 테마 관광자원 개발사업

관광과 (☏ 061-659-3881)

실태		급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적으로 대처하고 풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요
추진방향		조명 연합수군의 항일 전쟁 스토리를 활용하여 역사공원 조성
기대효과		조명연합수군의 항일전쟁 스토리 등 관광상품 개발을 통한 중국 및 국내 관광객 유치 증대와 새로운 관광인프라 구축으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 묘도동 410번지 일원

◦ 사업기간 : 2018. 1. ∼ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 테마공원 조성(29,534㎡)

◦ 사 업 비 : 95.5억원(국비 12.6, 도비 15.6, 시비 67.3)

◦ 공 정 율 : 100%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	95.5	95.5	-	-
국 비	12.6	12.6	-	-
도 비	15.6	15.6	-	-
시 비	67.3	67.3	-	-
기 타	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 기본계획 수립	: ’16. 10. 20.

◦ 공사 착공	: ’20.  9. 24.

◦ 상징조형물 설치	: ’22. 11.

◦ 공사 준공	: ’23. 12.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

04		사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업

관광과 (☏ 061-659-3882)

실태		급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적으로 대처하고 풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요
추진방향		세계적인 공룡발자국 화석산지 등 천혜의 자연경관을 활용한 관광콘텐츠 활성화를 위하여 인도교 설치
기대효과		주변의 아름다운 자연환경과 어우러지는 랜드마크 교량 설치로 2026여수세계섬박람회 성공 개최 기여 및 지역 주민의 쾌적하고 안전한 통행로 확보

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 화정면 낭도리 499-11번지 일원

◦ 사업기간 : 2023. 1. ∼ 2026. 6.

◦ 사업규모 : 인도교(L= 894m, B= 3.0m)

◦ 사 업 비 : 173억원(도비 81, 시비 92)

◦ 공 정 율 : 10%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	173	-	11	162
국 비	-	-	-	-
도 비	81	-	-	81
시 비	92	-	11	81
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 전라남도 지방재정 투자심사 완료(조건부 2단계)	: ’22. 12.  1.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’23. 11.

◦ 기본 및 실시설계용역 완료	: ’24.  9.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

05		여수시립박물관 건립

문화유산과 (☏ 061-659-4524)

실태		지역문화유산의 체계적 보존‧연구‧전시‧교육 가능한 박물관 부재
추진방향		지역민의 정체성 확립 및 지역문화 활성화 도모
기대효과		지역민의 문화향유 기회 확대 및 관광자원화로 지역발전에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1865-1번지 일원(이순신공원 내)

◦ 사업기간 : 2018 ∼ 2025

◦ 사업규모 : 부지면적 33,000㎡, 지상1층(연면적 5,605.3㎡)

◦ 사 업 비 : 293억원(국비 37, 도비 65, 시비 191)

◦ 공 정 율 : 45%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	293	87	71	135
국 비	37	37	-	-
도 비	65	-	25	40
시 비	191	50	46	95
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 여수시립박물관 건립 기본계획수립 용역	: ’18. 10. ~ ’19. 3.

◦ 공립박물관 설립타당성 사전평가 통과	: ’19.  5.

◦ 지방재정 중앙투자심사 승인(조건부 2단계)	: ’19.  7.

◦ 기본 및 실시설계용역	: ’20. 12. ~ ’23. 8.

◦ 박물관 건립 관련 행정절차 이행 완료	: ’23.  8.

◦ 여수시립박물관 건립공사 착공	: ’23. 10.

◦ 준공	: ’24. 12.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

06		진남관 보수정비사업

문화유산과 (☏ 061-659-4757)

실태		2004~2012년 구조모니터링 결과에 따라 보수 결정
추진방향		관계전문가의 자문을 받아 진남관 해체보수 및 주변 정비
기대효과		국가유산 보존으로 호국충절의 도시 정체성 확립 및 시민 자긍심 고취

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 동문로 11(군자동)

◦ 사업기간 : 2013 ∼ 2024

◦ 사업규모 : 진남관 해체보수, 가설덧집 설치 및 주변정비 등

◦ 사 업 비 : 194.74억 원(국비 136.22, 도비 20.37, 시비 38.15)

◦ 공 정 율 : 91%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	194.74	126.74	23.0	45.0
국 비	136.22	88.62	16.1	31.5
도 비	20.37	12.21	2.76	5.4
시 비	38.15	25.91	4.14	8.1
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 공사 착수	: ’15. 12.  9.

◦ 1차분 공사 준공	: ’18.  4. 27.

◦ 진남관 중수 상량식 거행	: ’23.  3. 15.

◦ 2차분 공사 준공	: ’23. 10. 17.

◦ 진남관 보수정비사업 완료	: ’24. 12.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

07		여수시 어린이도서관 생활SOC복합화 사업

도서관운영과 (☏ 061-659-4777)

실태		어린이 복합문화공간 수요 급증 및 죽림지구 신시가지 개발
추진방향		영유아 및 어린이를 위한 전문화된 독서문화체험시설 확충
기대효과		아동권리 증진 및 아동친화도시 이미지 제고

□ 사업개요

◦ 위    치 : 전라남도 여수시 소라면 죽림리 1248번지(산들공원)

◦ 사업기간 : 2021. 11. ～ 2025. 10.

◦ 사업규모 : 대지면적 5,239.4㎡, 연면적 2,824.56㎡, 지하1층～지상3층

◦ 사 업 비 : 130억원(국비 6.25, 도비 37.27, 시비 86.48)

◦ 공 정 율 : 20%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	130	13.07	30.81	86.12
국 비	6.25	6.25	0	0
도 비	37.27	0	20.27	17	균특전환
시 비	86.48	6.82	10.54	69.12
기 타	0	0	0	0

□ 사업 진행상황

◦ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	: ’20. 11. ～ ’21. 3.

◦ 균특예산 및 생활SOC 복합화사업 신청․선정	: ’21.  2. ～ 10.

◦ 공공건축 기획 용역 및 사업계획 사전 검토	: ’21. 11. ～ ’22. 3.

◦ 통합설계 공모 및 기본․실시설계 용역	: ’22.  4. ～ ’24. 8.

◦ 행정절차 이행	: ’23.  6. ～ ’24. 8.

◦ 착공 및 준공	: ’24.  9. ～ ’25. 10.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

08		원도심권 노인복지관 건립사업

노인장애인과 (☏ 061-659-3733)

실태		원도심권의 노인 인구에 대비하여 여가활동 공간 부족
추진방향		어르신의 수요에 맞는 쾌적하고 안전한 여가 환경 조성
기대효과		노인복지 및 노인편의 증진

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 관문동 861번지 외 22필지

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2025

◦ 사업규모 : 연면적 2,122㎡(지상 4층) / 부지 2,257㎡(648평)

◦ 사 업 비 : 11,912백만원(전액 시비)

◦ 공 정 율 : 35%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	119	67	1	51
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	119	67	1	51
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 여수시 도시관리계획 시설 결정	: ’20. 4.  9.

◦ 건축기획 용역 추진	: ’21. 1. ~ 6.

◦ 건축 설계공모 당선작 선정 및 설계용역 계약 체결	: ’21. 12.

◦ 도시계획시설사업 실시계획 고시	: ’22. 8. 11.

◦ 지방토지수용위원회 토지수용 재결	: ’23. 7.  5.

◦ 토지 보상 협의 및 공탁 종료	: ’23. 8.

◦ 협의 완료부지 건물 및 지장물 철거 공사 완료	: ’23. 12.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

09		웅천국민체육센터 건립공사

체육지원과 (☏ 061-659-3268)

실태		시민 체력 증진과 건강한 여가 활동을 지원하기 위하여 증가하는 체육시설 수요에 대응
추진방향		수영장(25m×5레인), 다목적 체육관 신축
기대효과		공공체육시설 균형배치를 통해 생활체육시설 사각지대 해소

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1865-1번지(이순신 공원)

◦ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2024. 12.

◦ 사업규모 : 다목적 체육관 신축(지하1층, 지상 2층/1동 연면적 2,496㎡, 수영장)

◦ 사 업 비 : 106억원(국비 40, 시비 60.12, 기타 6)

◦ 공 정 율 : 50%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	106.12	55	40	11.12
국 비	40	40	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	60.12	9	40	11.12
기 타	6	6	-	-

□ 사업 진행상황

◦ ’20년 생활체육시설 공모 선정(문체부)	: ’19.  9. 11.

◦ 전라남도 지방재정투자심사	: ’20.  3. 27.

◦ 실시설계 용역 착수	: ’21.  3. 23.

◦ 공사 착공	: ’23.  9. 15.

◦ 공사 준공	: ’24. 12.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

10		수산물 청정위판장 건립 사업

수산경영과 (☏ 061-659-3912)

실태		기존 위판장의 협소하고, 습기 등 노출된 구조로 상품성 저하
추진방향		위생시설(HACCP) 기준을 충족하는 위판장 건립
기대효과		입고에서 출고까지 폐쇄구조의 항온항습으로 신선한 수산물 공급

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 봉산동 100-16번지 외 4필지

◦ 사업기간 : 2023. 6. 28. ~ 2024. 6. 10.

◦ 사업규모 : 연면적 2,558㎡(1동, 지상2층, 철근콘크리트)

◦ 사 업 비 : 70억원(국비 24, 도비 3.6, 시비 14.4, 자담 28)

◦ 공 정 율 : 100%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	70	-	40	30
국 비	24	-	12	12
도 비	3.6	-	1.8	1.8
시 비	14.4	-	7	7.4
기 타	28	-	19	9

□ 사업 진행상황

◦ 2021년 수산물 청정위판장건립 공모사업 선정	: ’21. 3. 30.

◦ 보조금 교부결정	: ’22. 7. 29.

◦ 전라남도 지방재정 투자심사	: ’23. 5. 21.

◦ 시공사 선정 및 사업착공	: ’23. 6. 28.

◦ 수산물 청정위판장건립사업 준공	: ’24. 6. 10.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

11		남산공원 2단계 조성사업

공원과 (☏ 061-659-4623)

실태		온천개발 중단, 구.재건중학교 폐교 등 오랫동안 흉물로 방치
추진방향		자연형 도심근린공원 조성으로 푸른 여수 상징 및 시민 휴식공간 조성
기대효과		아름다운 여수바다를 조망할 수 있는 공원 조성으로 시민 및 관광객에게 쉼터 제공

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남산동 274번지 일원 (예암산 일원)

◦ 사업기간 : 2020. 6. ～ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 근린공원 조성 A=174,323㎡

- 진입도로 개설, 산책로, 암석원, 미로정원, 잔디광장 조성 등

◦ 사 업 비 : 96억 원 (전액시비 / 공사비 86, 보상비 10)

◦ 공 정 율 : 100%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	96	66	30	-
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	96	66	30
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 남산공원(2단계) 조성 여론조사 용역 및 결과 발표    : ’19.  1. 22.

- 자연형 도심 근린공원(63.3%), 관광형 랜드마크 공원(36.7%)

◦ 남산공원(2단계) 조성사업 착공                      : ’20.  6. 25.

◦ 남산공원(2단계) 조성사업 완료                      : ’23. 12. 26.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

12		장기미집행 공원 조성(무선산공원, 자산공원)

공원과 (☏ 061-659-4634)

실태		장기미집행공원 협의보상 지연으로 사유재산권 침해 및 도시공원 실효 위기
추진방향		토지보상을 위한 지방채 발행 등 예산 확보로 사유 토지 신속 매입
기대효과		장기미집행공원 완공으로 사유재산권 침해 해소 및 주민 편의 제공

□ 사업개요

◦ 위    치 : 2개소(무선산공원, 자산공원)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2027

◦ 사업규모 : 토지보상 562필지, 1,102천㎡

◦ 사 업 비 : 400억 원(시비 221, 기타 179)

◦ 공 정 율 : 무선산공원 57%, 자산공원 81%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	400	104	52	244
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	221	104	-	117
기 타	179	-	52	127	지방채

□ 사업 진행상황

◦ 무선산·자산공원 사유토지 감정평가(1차) 및 협의보상	: ’19. ～ ’20.

◦ 무선산 사유토지 재감정평가(2차) 및 협의보상	: ’22. ～ ’23.

◦ 지방채 179억 원(무선산 98, 자산 81) 발행 및 편성	: ’23.  2. ～ 12.

◦ ’24년 보상계획 열람공고 및 이의신청서 접수	: ’23. 12.

◦ 보상협의회(무선산·자산) 구성 및 회의 개최	: ’24. 2.～  6.

◦ 사유토지 재감정평가(무선산-3차, 자산-2차) 및 협의보상	: ’24. 2.～ 12.

□ 위치도
□ 전경사진(조감도)

13		연등천 재해예방 사업

건설과 (☏ 061-659-4037)

실태		기후변화, 도시화 등 도시 홍수위험 증가
추진방향		둔덕저류지(35만톤) 설치에 따른 내‧외수 침수 방지
기대효과		사업 추진에 따른 도심하천 홍수방어 능력 획기적 증대

□ 사업개요

◦ 위    치 : 둔덕동 303-2번지 일원

◦ 사업기간 : 2018. 1. ∼ 2026. 12.

◦ 사업규모 : 둔덕저류지(35만톤) 설치 1개소, 하천정비 1식 등

◦ 사 업 비 : 389억원(국비 195, 도비 58, 시비 136)

◦ 공 정 율 : 5%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	389	91	65	233
국비(전환)	195	44	22	129
도 비	58	15	7	37
시 비	136	32	36	68
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 지방하천 정비사업 국고보조금 확정 통보[국비 120억]	: ’18.  1. 29.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수[㈜삼안]	: ’20.  5. 11.

◦ 하천공사 시행계획 고시	: ’23.  3.  8.

◦ 사전행정절차 추진	: ’23. 3. ~ ’24. 4.

- 도로점용, 국유재산 무상귀속, 건설사업관리 적정성 심의, 일상감사, 도 계약심사

◦ 토목공사(총괄 및 1차분) 착공	: ’24.  6. 12.

◦ 건설사업관리용역(총괄 및 1차분) 착수	: ’24.  6. 18.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

14		소제지구 택지개발사업

공영개발과 (☏ 061-659-4575)

실태		산단 종사자 및 시민들의 택지 수요 증가
추진방향		국가산단 배후도시 개발로 산단 종사자에게 쾌적한 주거지 제공
기대효과		맞춤형 주거단지 개발로 인구 유출 방지 및 인구 유입에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 소호동 637번지 일원(소제마을)

◦ 사업기간 : 2016 ∼ 2026

◦ 사업규모 : 택지개발 418천㎡(126천평) / 계획인구 : 7,711명(3,084세대)

◦ 사 업 비 : 2,150억 원(전액 시비)

◦ 공 정 율 : 51 %

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	2,150	1,652	158	339
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	2,150	1,652	158	339
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 개발계획 변경 승인(전라남도)	: ’18. 6. 21.

◦ 실시계획 변경승인(여수시)	: ’20. 6. 25.

◦ 공사 착공	: ’21. 4. 28.

◦ 보상(수용재결)완료	: ’22. 6. 27.

◦ 개발(실시)계획 재수립(방침결정)	: ’23. 7. 19.

◦ 공사 준공 예정	: ’26. 12.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

15		경도 해양관광단지 진입도로 개설

도로과 (☏ 061-659-4071)

실태		경도지역 관광객 증가로 연륙교 건설 필요
추진방향		신월동~야도~경호동 연결 왕복2차로 연륙교 신설
기대효과		이동성과 접근성 구축 및 관광객 증가에 따른 교통수요 해소

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 신월도~야도~대경도

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2026

◦ 사업규모 : 진입도로 L=1.351㎞, B=13.5m~19.3m(연륙교 1.0㎞)

◦ 사 업 비 : 1,340억원 (국비40% 536, 도비20% 268, 시비20% 268, 민자20% 268)

◦ 공 정 율 : 19.3%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	1,340	691	50	599
국 비	536	241	20	275
도 비	268	150	10	108
시 비	268	150	10	108
기 타	268	150	10	108

□ 사업 진행상황

◦ 경도해양관광단지 경제자유구역 지정·고시(산업부)	: ’17. 11. 22.

◦ 진입도로 반영 개발계획 변경 고시(산자부)	: ’20.  9. 17.

◦ 개발계획 변경 승인(전남도)	: ’23.  6. 22.

◦ 실시계획승인 고시	: ’23.   7. 27.

◦ 공사 착공	: ’23.   9.  4.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

16		수산시장3 주차전용건축물 신축 공사

주차차량과 (☏ 061-659-4149)

실태		주택 및 상가 밀집지역으로 현재 운영중인 공영주차장을 주차 전용 건축물로 조성하여 주차난 해소
추진방향		주차전용건축물 신축
기대효과		상가 밀집지역의 주차난 해소와 불법 주정차 예방

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 남산동 1165번지 일원

◦ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 2023. 3.

◦ 사업규모 : 주차타워 2층 3면(연면적 3,607㎡, 주차 148면)

◦ 사 업 비 : 90.8억원(국비 21, 시비 69.8)

◦ 공 정 율 : 100 %

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	90.8	90.8	-	-
국 비	21	21	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	69.8	69.8	-	-
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 중기지방재정계획 반영	: ’17. 09. 28.

◦ 지방재정투자심사(여수시)반영	: ’17. 10. 24.

◦ 도시계획 실시계획 인가	: ’18. 05. 04.

◦ 공사 착공	: ’21. 06. 23.

◦ 공사 준공	: ’23. 03. 20.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

17		화장동 공영주차장(타워) 신축 공사

주차차량과 (☏ 061-659-4149)

실태		주택 및 상가 밀집지역으로 현재 운영중인 공영주차장을 주차 전용 건축물로 조성하여 주차난 해소
추진방향		주차전용건축물 신축
기대효과		상가 밀집지역의 주차난 해소와 불법 주정차 예방

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 화장동 795-1

◦ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2024. 1.

◦ 사업규모 : 주차타워 3층 4면(연면적 7,842㎡, 주차 294면)

◦ 사 업 비 : 117억원(국비 20, 시비 94, 기타 3)

◦ 공 정 율 : 100 %

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	117	43	74	-
국 비	20	20	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	94	20	74	-
기 타	3	3	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 공유재산관리계획 의결(시의회)	: ’19. 10. 23.

◦ 지방재정 투자심사(전라남도)	: ’19. 12. 30.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: ’21. 02. 18.

◦ 공사 착공	: ’22. 10. 27.

◦ 공사 준공	: ’24. 01. 31.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

18		학용정수장 고도정수처리시설 설치

상수도과 (☏ 061-659-4909)

실태		정수장 시설물의 노후화로 개량사업 시행 필요
추진방향		첨단 막여과 고도정수처리시설 도입
기대효과		정수처리시설 현대화로 안정적인 수도 기반시설 확충과 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 학용정수장

◦ 사업기간 : 2012. 1. ～ 2023. 10.

◦ 사업규모 : 고도정수처리시설(막여과) 42,000㎥/일

◦ 사 업 비 : 213억원 (국비 111, 도비 10, 시비 92)

◦ 공 정 율 : 100% (준공)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	213	65	41	107
국 비	111	44	10	57
도 비	10	2	1	7
시 비	92	19	30	43
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 고도정수처리시설 보조사업 확정(환경부)	: ’12.  2.

◦ 기본 및 실시설계 완료 (착수 2012. 8. 31.)	: ’14.  6.

◦ 계약의뢰(여수시 → 조달청)	: ’15. 11.

◦ 막여과 기자재 구입계약 체결	: ’18. 10.

◦ 사업 시행	: ’19.  6. ～ ’23. 10.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

19		여수시 지방상수도 현대화사업

상수도과 (☏ 061-659-4932)

실태		여수시 전체 유수율 63.0%
추진방향		사업대상지 목표유수율 50.5% → 85% 달성
기대효과		노후상수관망 정비로 안전하고 개끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

◦ 위    치┍ 전  지  역: 블록시스템 구축, 유지관리시스템 구축

┕ 둔덕중블록: 노후관 교체, 누수탐사 및 정비(유수율 85% 달성 대상)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2025

◦ 사업규모 : 블록시스템 84개, 유지관리시스템 1식, 노후관교체 61.3㎞누수탐사 147㎞ 등

◦ 사 업 비 : 513억원(국비 256, 시비 257)

◦ 공 정 율 : 29%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	513	191	78	244
국 비	256	97	39	120
도 비	-	-	-	-
시 비	257	94	39	124
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’20. 12.

◦ 사전기술검토 협의완료(환경부 → 여수시)	: ’23.  1.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: ’23.  5.

◦ 관망운영 및 누수탐사용역 착수	: ’23. 10.

◦ 블록구축 및 관망 정비, 유지관리시스템 설치 착공	: ’24.  1.

□ 위치도

20		문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사

하수도과 (☏ 061-659-4981)

실태		우·오수 합류식 관로 지역(문수주택단지) 주거 환경 열악
추진방향		분류식 하수관로 시설 구축
기대효과		하수도 시설 개선으로 악취민원 해소 및 지역민 정주여건 개선

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 문수동 29-50번지 일원

◦ 사업기간 : 2020. 7. ∼ 2024. 5.

◦ 사업규모 : 관로 L=8.6㎞, 배수설비 634가구

◦ 사 업 비 : 97억원(국비 68, 시비 29)

◦ 공 정 율 : 준공(100%)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	97	69	16	12
국 비	68	63	-	5
도 비	-	-	-	-
시 비	29	6	16	7
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 실시설계용역 착수	: ’21.  6. 28.

◦ 총괄 및 1차분 착공	: ’21.  8.  9.

◦ 2차분 착공	: ’22.  1. 24.

◦ 3차분 착공	: ’23.  2. 10.

◦ 총괄 및 3차분 준공	: ’23. 12. 28.

◦ 관련 용역 준공	: ’24.  5. 30.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)