[별첨 9] 개별 지방채 발행사업의 추진현황

사업명

무선산공원 조성

담당자

공원과(☎659-4634)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획 도시공원 토지보상 및 중장기 투자계획에 의한 재정 투자사업의 원활한 추진을 위함

○ 도시계획시설로 결정된 장기미집행공원 보상 지연으로 인한 사유 재산권 침해 해소 및 도시공원 실효를 방지하여 시민들의 휴식 공간을 확보하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 여수시 소라면 죽림리 2-3번지 일원

○ 규 모 : 875,000㎡(243필지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,582백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	48,582	5,700	5,228	4,572	33,082
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,482	5,700	-	-	6,782
지 방 채	36,100	-	5,228	4,572	26,300
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 57%)

○ 토지매수 현황                                           (단위: 천㎡)

공원명	총 대상		기 매입			미 매입
	면적	필지	면적	필지	비율(%)	면적	필지	비율(%)
무선산공원	875	243	499	153	57	376	90	43

○ ’24년 보상계획 열람공고 및 이의신청서 접수	: ’23. 11.

○ 보상협의회 구성 및 회의 개최	: ’24. 2.

○ 사유토지 재감정평가(3차) 및 협의보상요청(1차)	: ’24. 2.~ 6.

□ 향후계획

○ 협의보상(2·3차)	: ’24. 8. ~ 12.

○ 지방채 발행 및 수용재결 신청	: ’25. 1. ~ 6.

사업명

자산공원 조성

담당자

공원과(☎659-4634)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획 도시공원 토지보상 및 중장기 투자계획에 의한 재정 투자사업의 원활한 추진을 위함

○ 도시계획시설로 결정된 장기미집행공원 보상 지연으로 인한 사유 재산권 침해 해소 및 도시공원 실효를 방지하여 시민들의 휴식공간을 확보하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 여수시 수정동 75번지 일원

○ 규 모 : 227,000㎡(319필지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,775백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	38,775	14,000	13	8,087	16,675
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	18,775	14,000	-	-	4,775
지 방 채	20,000	-	13	8,087	11,900
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 81%)

○ 토지매수 현황                                           (단위: 천㎡)

공원명	총 대상		기 매임			미 매입
	면적	필지	면적	필지	비율(%)	면적	필지	비율(%)
자산공원	227	319	185	198	81	42	121	19

○ ’24년 보상계획 열람공고 및 이의신청서 접수	: ’24. 3.

○ 보상협의회 구성 및 회의 개최	: ’24. 6.

○ 사유토지 재감정평가(2차)                                   : ’24. 6.

□ 향후계획

○ 자산공원 조성사업 사유토지 및 지장물 보상협의요청         : ’24. 8. ~ 12.

○ 지방채 발행 및 수용재결 신청	: ’25. 1. ~ 6.