정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	복산지구 배수개선사업
② 추진배경	매년 장마철 상습 침수지역인 저지대인 배수장, 배수문, 배수로 등 배수시설 개선을 통한 안정적인 영농여건 도모 및 농작물 침수피해 예방
③ 사업개요	○ 위 치: 소라면 복산리 일원(수혜면적 51.3ha) ○ 사 업 량: 배수개선 1식(배수장 1개소, 제방숭상 0.97㎞ 등) ○ 사 업 비: 6,727백만원(국비 100%)
④ 사업부서	도시건설국 건설과		⑤ 담당자		시설5급 장현철 시설6급 차재원 시설7급 박채원
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업		⑦ 사업기간		2021. 12. ~ 2025. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 국비 우선지원 건의 ※ 건설과-9121(2019. 7. 9.)		‘19. 7. 9.		주영근 과장 박성식 팀장 김한수 주무관
○ ’20년도 배수개선사업 신규 착수지구 선정 및 예산배정 알림 ※ 전라남도 농업정책과-9350(2020. 6. 8.)		’20. 6. 8.		주영근 과장 조정선 팀장 차재원 주무관
○ 추진 주체 검토보고 ※ 건설과-9836(2020. 7. 6.)		‘20. 7. 6.		권오봉 시장 서은수 부시장 장세길 국장 주영근 과장 조정선 팀장 차재원 주무관
○ 위(수)탁 협약체결 계획 ※ 건설과-14256(2020. 10. 5.)		‘20. 10. 5.		장세길 국장 주영근 과장 조정선 팀장 차재원 주무관
○ 세부설계(안)에 따른 주민설명회 개최 알림 ※ 한국농어촌공사 순천광양여수지역-1307(2021. 6. 24.)		’21. 6. 24.		박상훈 과장 김승주 팀장 김창오 주무관
○ 세부설계(안)에 따른 주민설명회(2차) 개최 알림 ※ 한국농어촌공사 순천광양여수지역-1307(2021. 6. 24.)		’21. 7. 19.		박상훈 과장 김승주 팀장 김창오 주무관

○ 시행계획 공고 ※ 건설과-19047(2021. 7. 23.)	‘21. 7. 23.	박상훈 과장 김승주 팀장 김창오 주무관
○ 토지 보상계획 공고 ※ 건설과-18423(2021. 12. 21.)	‘21. 12. 21.	박상훈 과장 김승주 팀장 김창오 주무관
○ 시행계획 승인 ※ 전라남도 농업정책과-22045(2021. 12. 29.)	‘21. 12. 30.	박상훈 과장 김승주 팀장 김창오 주무관
○ 시행계획 변경승인(1차) ※ 전라남도 농업정책과-10172(2022. 6. 24.)	‘22. 6. 24.	심근하 과장 김승주 팀장 안준희 주무관
○ 도시개발사업 등의 착수 신고 ※ 건설과-629(2023. 1. 13.)	‘23. 1. 13.	심근하 과장 홍종옥 팀장 임영수 주무관
○ 시행계획 변경승인(2차) ※ 전라남도 농업정책과-13800(2023. 8. 25.)	‘23. 8. 25.	주영근 과장 장현철 팀장 임영수 주무관
○ 건축허가 신청서 제출 ※ 건설과-16177(2023. 9. 7.)	‘23. 9. 7.	주영근 과장 장현철 팀장(병가) 임영수 주무관
○ 건축허가사항 알림 ※ 허가과-38239(2023. 10. 19.)	‘23. 10. 19.	주영근 과장 장현철 팀장 임영수 주무관
○ 시행계획 변경승인(3차) ※ 전라남도 농업정책과-19907(2023. 12. 13.)	‘23. 12. 13.	주영근 과장 장현철 팀장 임영수 주무관
○ 변경 협약체결 및 위탁사업비 교부계획 검토보고 ※ 건설과-8941(2024. 5. 13.)	‘24. 5. 13.	정기명 시장 김종기 부시장 염승렬 국장 김정남 과장 최종춘 팀장 박채원 주무관
○ 배수펌프장 전기사용 신청 ※ 건설과-9081(2024. 5. 14.)	‘24. 5. 14.	김정남 과장 최종춘 팀장 박채원 주무관
○ 시행계획 변경승인(4차) ※ 전라남도 농업정책과-19907(2023. 12. 13.)	‘24. 7. 15.	장현철 과장 차재원 팀장 박채원 주무관
○ 인터넷 신규 가입 신청 ※ 건설과-6304(2025. 4. 14.)	‘25. 4. 14.	장현철 과장 차재원 팀장 박채원 주무관
○ 전기설비 사용전검사 신청 ※ 건설과-6548(2025. 4. 16.)	‘25. 4. 16.	장현철 과장 차재원 팀장 박채원 주무관
○ 시행계획 변경승인(5차) ※ 전라남도 농업정책과-6539(2025. 4. 8.)	‘25. 4. 8.	장현철 과장 차재원 팀장 박채원 주무관

○ 시행계획 변경승인(6차) ※ 전라남도 농업정책과-7237(2025. 4. 18.)	‘25. 4. 18.	장현철 과장 차재원 팀장 박채원 주무관
○ 변경 협약체결 및 위탁사업비 교부계획 검토보고 ※ 건설과-8503(2025. 5. 12.)	‘25. 5. 12.	정기명 시장 최정기 부시장 이영호 국장 장현철 과장 차재원 팀장 박채원 주무관
○ 준공검사 입회 요청 ※ 한국농어촌공사 순천광양여수농어촌사업-1298(2025. 6. 17.)	‘25. 6. 17.	김정남 과장 최종춘 팀장 박채원 주무관