정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	우두건강증진형 보건지소 신축사업
② 추진배경	우두출장소 내 우두보건지소가 협소하여 낮은 공공보건의료 서비스를 제공해 왔으나 건강증진 사업까지 함께 서비스를 제공하는 건강증진형 보건지소를 건립하여 질 높은 공공 보건의료 서비스 제공
③ 사업개요	- 위 치 : 돌산읍 우두리 1117-8번지 - 규 모 : 연면적 654㎡, 지상 2층/1동 - 총사업비 : 3,594백만원(국비 930, 도비 232, 시비 232, 시비(자체) 2,200)
④ 사업부서	여수시 보건행정과		⑤ 담당자	행정5급 김수연 시설8급 김다훈
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2022. 10 ~ 2026. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 시민과의 대화 처리계획 제출 ※ 보건행정과-8838호(’22.02.14.)		’22. 2. 14.	조재봉 과장 이기숙 팀장 박병철 팀장 서경아 팀장 정기남 주무관
○ 공유재산 심의 완료 ※ 회계과-49113호(’22.10.17.)		’22.10.17.	조재봉 과장 이기숙 팀장 임정욱 차장
○ 방침결정 ※ 보건행정과-52900호(’22.10.25.)		’22.10.25.	정기명 시장 박현식 부시장 박춘순 보건소장 조재봉 과장 이기숙 팀장 박선희 주무관
○ 지방재정 투자심사 완료 ※ 기획예산담당관-3461호(’23.3.2.)		’23.3.2.	조재봉 과장 이기숙 팀장 임정욱 차장
○ 건축기획용역 시행 ※ 보건행정과-17097호(’23.4.25.)		’23.4.25.	최영철 과장 서영수 팀장 서경아 팀장 임정욱 차장
○ 공공건축 사업계획 사전검토 요청 ※ 보건행정과-23470호(’23.6.12.)		’23.6.12.	최영철 과장 서영수 팀장 임정욱 차장
○ 건축설계공모 계획 보고 ※ 보건행정과-36181호(’23.9.6.)		’23.9.6.	정기명 시장 김종기 부시장 신준섭 보건소장 최영철 과장 오영석 팀장 임정욱 차장
○ 공공건축심의 완료 ※ 건축과-33747호(’23.9.18.)		’23.9.18.	최영철 과장 오영석 팀장 임정욱 차장
○ 건축기획용역 완료 ※ 보건행정과-40743호(’23.10.13.)		’23.10.13.	최영철 과장 오영석 팀장 임정욱 차장
○ 건축설계공모 결과 보고 ※ 보건행정과-43962호(’23.11.3.)		’23.11.3.	신준섭 보건소장 최영철 과장 오영석 팀장 임정욱 차장
○ 기본 및 실시설계 용역 시행 ※ 보건행정과-44785호(’23.11.10.)		’23.11.10.	최영철 과장 오영석 팀장 임정욱 차장
○ 한국건강증진개발원 시설설계심의 결과 보고 ※ 보건행정과-3709호 (’24.1.26.)		’24.1.15.	최영철 과장 오영석 팀장 임정욱 차장
○ 신축공사 일상감사 완료 ※ 감사담당관-12188호(’24.11.19.)		’24.11.19.	최영철 과장 오영석 팀장 김다훈 주무관
○ 신축공사 계약심사 완료 ※ 전라남도 회계과-58582호 (’24.11.28.)		’24.11.28.	최영철 과장 오영석 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 시행 보고 ※ 보건행정과-46523호(’24.12.3.)		’24.12.3.	정기명 시장 최정기 부시장 신준섭 보건소장 최영철 과장 오영석 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 적격심사 결과 보고 ※ 보건행정과-47835호(’24.12.12.)		’24.12.12.	최영철 과장 오영석 팀장 김다훈 주무관
○ 감리용역 시행 ※ 보건행정과-48489호(’24.12.17.)		’24.12.17.	최영철 과장 오영석 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 계약 체결 ※ 보건행정과-48927호(’24.12.19.)		’24.12.19.	최영철 과장 오영석 팀장 김다훈 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 완료 ※ 보건행정과-49213호(’24.12.23.)		’24.12.23.	최영철 과장 오영석 팀장 김다훈 주무관
○ 감리용역 계약 체결 ※ 보건행정과-50188호(’24.12.31.)		’24.12.31.	최영철 과장 오영석 팀장 김다훈 주무관
○ 감리용역 착수 ※ 보건행정과-1091호(’25.1.8.)		’25.1.8.	임병종 과장 나경숙 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 착공 ※ 보건행정과-2684호(’25.1.17.)		’25.1.17.	임병종 과장 나경숙 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 관급자재 설계변경 ※ 보건행정과-20515호(’25.5.28.)		’25.5.28.	임병종 과장 나경숙 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 하도금 계약 적정성 검토 보고 ※ 보건행정과-29578호(’25.8.4.)		’25.8.4.	서현숙 보건소장 김수연 과장 나경숙 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 공사 기간 연장 검토 보고 ※ 보건행정과-32695호(’25.8.27.)		’25.8.27.	서현숙 보건소장 김수연 과장 나경숙 팀장 김다훈 주무관
○ 감리용역 설계변경 검토 보고 ※ 보건행정과-45972호(’25.12.12.)		’25.12.12.	김수연 과장 나경숙 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 공사 기간 연장 검토 보고 ※ 보건행정과-1055호(’26.1.9.)		’26.1.9.	윤현정 보건소장 김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 2차분 시행 ※ 보건행정과-1519호(’26.1.23.)		’26.1.23.	윤현정 보건소장 김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 2차분 계약 체결 ※ 보건행정과-4175호(’26.1.30.)		’26.1.30.	김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 2차분 착공 ※ 보건행정과-5223호(’26.2.6.)		’26.2.6.	김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 공사 기간 연장 검토 보고 ※ 보건행정과-9258호(’26.3.12.)		’26.3.12.	윤현정 보건소장 김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 설계변경 검토 보고 ※ 보건행정과-12642호(’26.4.6.)		’26.4.6.	정현구 부시장 윤현정 보건소장 김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 변경 계약 체결 ※ 보건행정과-15193호(’26.4.22.)		’26.4.22.	김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관
○ 감리용역 설계변경 검토 보고 ※ 보건행정과-16733호(’26.5.4.)		’26.5.4.	김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 설계변경 검토 보고 ※ 보건행정과-19034호(’26.5.21.)		’26.5.21.	윤현정 보건소장 김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 변경 계약 체결 ※ 보건행정과-19525호(’26.5.27.)		’26.5.27.	김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 1차분 준공 ※ 보건행정과-19736호(’26.5.28.)		’26.5.28.	김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관
○ 건립공사 2차분 준공 ※ 보건행정과-20164호(’26.6.1.)		’26.6.1.	김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관
○ 감리용역 완료 ※ 보건행정과-21976호(’26.6.14.)		’26.6.14.	김수연 과장 김미옥 팀장 김다훈 주무관